특  수  공  시

2016년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2015년도】

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
1	우수저류시설 설치(모현지구)	-사업기간: 2014~2016 -총사업비: 16,523백만원 -사업규모: 저류시설 Q=15,000㎥ -사업내용: 저류시설 설치	시민안전과	77
2	익산비즈니스센터 건립	-사업기간: 2013~2017(5년) -총사업비: 175억원 -사업규모: 부지면적 6,000㎡ 건축면적 8,548㎡ -사업내용: 지하1층, 지상 6층	투자유치과	79
3	고용복지플러스센터 설치 운영	-사업기간: 2014. 11 ~ 2015. 12. -총사업비: 63백만원 -사업규모: 복지.일자리, 익산고용센터, 익산여성새로일하기센터, 서민금융안정 종합지원센터 -사업내용: 소규모 리모델링, 물품구입	민생경제과	81
4	함라 한옥체험단지 조성	-사업기간: 2007 ~ 2018 -총사업비: 10,500백만원 -사업규모: 한옥체험단지 조성 -사업내용: 한옥숙박시설, 음식점 및 찻집, 전통정원, 주차장, 공원, 전통체험관 등	문화관광과	83
5	대표관광지(보석테마관광지) 육성사업	-사업기간: 2015 ~ 2019 -총사업비: 9,500백만원 -사업규모: 160,460㎡ -사업내용: 보석광장 및 칠선녀광장정비, 공룡테마공원, 보석숲 조성 등	문화관광과	86
6	무형문화재 통합전수관 건립	-사업기간: 2013 ~ 2016년 -총사업비: 6,600 -사업규모: 지하1층 지상2층 3,919㎡ -사업내용: 통합전수관 건립	역사문화재과	88

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
7	소라산 공원(자연마당) 조성사업	-사업기간: 2009년 ~ 2018년 -총사업비: 15,000백만원 -사업규모: 81,331㎡ -사업내용: 생태관, 산책로, 생태습지 등	산림공원과	90
8	황등 지역형 노인복지관 및 도서관 건립	-사업기간: 2014.5.∼2015.12. -총사업비: 1,800백만원 -사업규모: 941.24㎡ -사업내용: 노인종합복지관 및 도서관신축	경로장애인과 시립도서관	92
9	취약지역 생활여건 개선사업 (새뜰마을사업)	-사업기간: 2015~2018년(4년) -총사업비: 6,624백만원 -사업규모: 약35,000㎡ -사업내용: 안전확보, 생활∙위생인프라, 주택정비, 휴먼케어사업 등	도시개발과	94
10	농촌중심지 활성화 사업 (여산면)	-사업기간 : 2012 ~ 2016 -총사업비 : 7,000백만원 -사업내용 : 가람어울림센터, 만남의 광장, 통학로인도, 천변산책로, 재래시장정비, 이병기생가 탐방로, 간판정비 등	농업정책과	96
11	국가식품클러스터 정부기업 지원시설 구축	-사업기간: 2014 ~ 2016 -총사업비: 64,836 -사업규모: 건축연면적 28,705㎡ -사업내용: 6개 H/W시설 구축	식품클러스터지원과	100
12	유천생태습지 및 생태하천 복원사업	-사업기간: 2009.1~2015.11 -총사업비: 28,550백만원 -사업규모: 습지 135천㎡, 하천 1.3km -사업내용: 생태습지 조성 및 하천정비	하수관리과	102

1		우수저류시설 설치(모현지구)

❖ 집중호우시 침수피해를 대비 우수저류시설을 설치하여 시민의 재산과 생명을 보호하고자 함

사업개요

❍ 사업기간 : 2014~2016

❍ 위    치 : 익산시 모현동1가 180번지 일원

❍ 사업규모 : 우수저류시설 Q=15,000㎥

❍ 총사업비 : 16,523백만원

❍ 사업내용 : 저류시설 A=2,500㎡, 관거 L=185m, 주차장 47대

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	16,523	3,000	9,000	4,523	-
국 비	8,262	1,500	4,500	2,262	-
도 비	2,478	450	1,350	678	-
시 비	5,783	1,050	3,150	1,583	-
기 타	-	-	-	-	-

’15년까지 추진실적

❍ 실시설계 1식

❍ 용지매입 : 22필지 4,854㎡, 지장물 39건 매입

❍ 공사착공 및 추진 : 지장물 철거 39건, 공사가설휀스 설치 1식

향후 추진계획

❍ 공사추진 : 저류시설 설치 A=2,500㎡, 관거 설치(2.5×2.0m) L=185m,

주차장 설치 47대

기대효과

❍  50년빈도 호우발생시 침수면적 5.8ha, 주택 99동 침수예방

❍ 침수피해로부터 시민의 재산과 생명 보호

관련사진 첨부

(담당부서 : 시민안전과     계장 : 이정노     담당자 : 이덕원 ☎859-5954)

2		익산 종합비즈니스센터 건립

❖ 혁신 산업자원 집적화 및 네트워킹 활성화

❖ 산업 융복합 벨트 중심 거점지구 조성

사업개요

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2017(5년)

❍ 위    치 : 익산시 약촌로 10길 30 일원(국가산단 내 귀금속 2단지)

❍ 사업규모 : 부지면적 6,000㎡, 건축면적 8,548㎡(지하1층, 지상6층)

❍ 총사업비 : 175억원(국비 40, 도비 12, 시비 24, 산단공 95)

❍ 사업내용

구 분	층수	용 도	면 적(㎡)	비고
합 계		총 7개층	8,548
지 상	6	근린생활시설, 기업지원기관	750
	5	한국산업단지공단, 신용보증기금	1,012
	4	3D프린팅 호남권제조혁신센터	1,015
	3	기업지원기관, 조명연구원	1,018
	2	한국조명연구원 전북분원	1,431
	1	근린생활, 회의실, 방송실	1,370
지 하	1	근린생활, 기계실(조명연구원, 3D프린팅)	1,952

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	17,500	3,500	4,900	5,900	3,200
국 비	4,000	1,700	100	500	1,700
도 비	1,200	300	900
시 비	2,800	1,500	1,300
기 타	9,500	-	2,600	5,400	1,500

’15년까지 추진실적

❍ 종합비즈니스센터 건립 MOU체결(전북도, 익산시, 산단공)	: 2014. 12. 15.

❍ 종합비즈니스센터 실시설계용역	:  2015. 5. 28. ~ 10. 14.

❍ 호남권 3D프린팅 제조혁신센터 및 한국조명연구원 전북분원등 입주 협의	: 4 회

▸기관별 요구사항 설계반영 확인 등

❍ 종합비즈니스센터 건립 실무협의회 개최(익산시, 산단공)           : 5 회

▸진입도로 확보 및 국가예산 확보 대책 등

❍ 종합비즈니스센터 착공                              : 2015. 12. 22.

향후 추진계획

❍ 기존 건축물 철거 및 폐기물처리, 기초공사시행	: 2016. 1. ~ 4월

❍ 종합비즈니스센터 건축공사(5,970백만원) 시행	: 2016. 4 ~ 2017. 5월

❍ 종합비즈니스센터 전기, 통신 및 소방공사 시행      : 2016. 8 ~ 2017. 5월

▸전기공사(728백만원), 통신공사(332백만원), 소방공사(598백만원)

❍ 기업지원기관 추가 입주 협의(한국산업단지공단)               : 2016. 8월

▸기술보증기금, 귀금속보석연구원 및 익산시 기업지원(창업지원)센터 등

❍ 종합비즈니스센터 준공                                      : 2017. 5월

기대효과(사업효과)

❍ 익산국가산업단지 입주기업의 생산 활동 지원 및 경쟁력강화

관련사진 첨부

(담당부서 :  투자유치과  계장 : 조우영  담당자 : 임대성 ☎ 859-5766)

3		고용복지 플러스센터 설치 운영

시민들이 고용과 복지를 한곳에서 편리하게 원스톱 통합서비스 받을 수

있도록 고용복지플러스센터를 익산고용센터내 설치하여 시민편의를 제공

하고자 함

사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 11 ~ 2015. 12

❍ 위    치 : 익산시 익산대로 52길 11(남중동)

❍ 사업규모 : 복지▪일자리지원, 익산고용센터, 익산여성새로일하기센터,

서민금융안정종합지원센터

❍ 총사업비 : 63,000천원

❍ 사업내용 : 소규모 리모델링, 물품구입

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	67		63	4
국 비
도 비
시 비	67		63	4	-
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 고용복지플러스센터 공모 신청                    : 2014. 11. 26

❍ 고용복지플러스센터 유치 확정                    : 2015. 3. 17

❍ 소규모 리모델링 및 운영비 예산(시비 63백만원) 확보  : 2015. 6. 29

❍ 입주기관별 사용공간 배치 협의 완료                 : 2015. 9.

❍ 리모델링 관련 소요예산(국비)확보 및 공사 설계       : 2015. 9

❍ 고용복지플러스센터 리모델링공사                : 2015. 10. ~ 11. 28

❍ 고용복지플러스센터 4개기관 입주 업무개시           : 2015. 11. 30

❍ 고용복지플러스센터 개소식                          : 2015. 12. 17.

기대효과(사업효과)

❍ 매달 실무협의회, 운영위원회 및 수시로 업무공유를 통해 애로사항

건의사항 등을 서로 공유, 질높은 서비스를 제공

❍ 전년동기 대비 실적이 높아졌으며, 연계처리의 실적이 고용복지플러스

센터 설치된 타시군보다 높음

❍ 고용복지플러스센터 방문민원과 연계하여 워크아웃, 프리워크아웃 등

신용회복 대상자는 증가

관련사진 첨부

(담당부서 :  민생경제과    계장 :  이재경    담당자 : 박정자  ☎ 859 - 5216 )

4		함라 한옥체험단지 조성사업

❖ 함라 삼부잣집과 연계한 한옥체험단지를 조성하여 우리시를 방문하는 관광객 및 외국인에게 전통한옥의 우수성 홍보 및 지역주민 소득 창출

사업개요

❍ 사업기간 : 2007 ~ 2018

❍ 위    치 : 함라면 함열리 572-1번지 일원(함열향교 인근)

❍ 사업규모 : 한옥체험단지 조성

❍ 총사업비 : 10,500백만원

❍ 사업내용

□1단계 – 체험단지 부지조성, 주차장ㆍ공원ㆍ광장조성 및 도로정비 등

□2단계 – 한옥숙박시설(2동 7실), 음식점 및 찻집, 전통정원 등

□3단계 – 노소, 홍보관, 전통담장길, 전통체험관, 조경 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	10,500	3,920	1,500	2,880	2,200
국 비	3,250		750	1,400	1,100
시 비	7,250	3,920	750	1,480	1,100

’15년까지 추진실적

❍ 함라한옥마을체험단지 조성사업 타당성 조사연구 용역	: 2007. 10

❍ 재정투융자심사(전라북도)	: 2007. 11

❍ 주민추진위원회 구성(4개마을)	: 2013. 2

❍ 1단계 사업(기반조성) 준공	: 2014. 6

❍ 2단계(추진중) : 한옥 숙박체험시설, 저잣거리(음식점,찻집), 전통담장등

□함라 한옥숙박시설 기본 및 실시설계 용역	2015.2.24.~ 9.18

□2단계사업(한옥숙박시설) 착공(현공정률 50%)  2015. 10. 16

❍ 3단계 사업 설계용역 착수	: 2016. 3. 29

□노소, 홍보관, 전통담장길, 조경

향후 추진계획

❍  2단계 사업(한옥숙박시설)

▸ 함라 한옥체험관 관리 운영조례 개정         : 2016. 8 ~ 9

▸ 2단계 한옥체험단지 민간위탁	: 2016.  9 ~ 2016. 12

❍ 3단계사업(노소, 홍보관, 전통체험관 등)

▸2016년 (노소, 홍보관, 전통담장길, 조경) 설계용역 완료	: 2016. 8.

▸2016년 (노소, 홍보관) 공사착공                 : 2016. 9

▸2017년 (전통체험관) 설계용역 착공                      : 2016. 9

기대효과(사업효과)

❍  함라에 소재하는 독특한 문화재인 한옥문화재(삼부자집), 함열향교등과 연계한 전통담장길, 노소정비, 홍보관, 전통체험관을 조성하여 관광  자원화함으로써 주민 소득창출 기반마련, 체류형 문화공간 조성으로 문화유산과 함께하는 지역명소 조성

관련사진 첨부

(담당부서 : 문화관광과  계장 : 조규석   담당자 : 조기웅 ☎063-859-5276)

5		대표관광지(보석테마관광지) 육성사업

❖ 전라북도 공약사업인 토탈관광의 일환으로 추진 지원하는 사업으로서 전국 유일의 보석테마관광지 육성을 통한 지속적인 관광객 유입과 이에 따른 지역경제 활성화 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2019

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

❍ 사업규모 : 160,460㎡

❍ 총사업비 : 9,500백만원(국비3,300 도비5,000 시비1,200)

❍ 사업내용

□관광기반 조성 : 보석광장 및 칠선녀광장 정비, 공룡테마공원, 보석숲 웨딩이벤트 광장 등

□관광진흥 조성 : 블링블링 주얼리 페스티벌, 주얼리 팸투어 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	9,500 (928)	-	1,000 (800)	1,000 (128)	7,500
국 비	3,300	-			3,300
도 비	5,000 (928)	-	1,000 (800)	1,000 (128)	3,000
시 비	1,200	-			1,200

’15년까지 추진실적

❍ 육성계획 수립 및 실시설계 용역 착수	: 2015. 4

❍ 대표관광지 육성사업 자문단 구성 및 운영	: 2015. 5 ~ 7

❍ 대표관광지 육성 기본계획 승인(전라북도)	: 2015. 8

❍ 지방재정 투자심사(전라북도)	: 2015. 10

❍ 육성계획 수립 및 실시설계 용역 준공	: 2015. 12

❍ 보석테마관광지(보석광장) 정비공사 착공	: 2015. 12

□보석광장 포장정비, 홍보전광판(LED) 설치, 조경수 식재 등

❍ 보석테마관광지(칠선녀광장) 설계용역 준공	: 2016. 6

향후 추진계획

❍ 보석테마관광지(보석광장) 정비공사 준공	: 2016. 8

❍ 보석테마관광지(칠선녀광장) 정비공사 추진	: 2016. 7 ~ 12

□야간경관시설(빛 조형물), 칠선녀 분수 보강, 조경식재 등

❍ 블링블링 주얼리 페스티벌 등 행사추진	: 2016. 10

❍ 연차별 사업추진	: 2017. 1 ~ 2019. 12

기대효과(사업효과)

❍ 지역 내 토탈관광을 위한 기반 정비로 관광지 인지도 향상 및 관광홍보 마케팅부문 강화 등을 통한 관광환경 개선

관련사진 첨부

(담당부서 : 문화관광과   계장 : 조규석  담당자 : 남승복 ☎ 859 – 5871)

6		중요무형문화재 통합전수관 건립

❖ 지역 중요 무형문화유산의 열악한 전수환경을 개선하고 전통문화유산과의 공간적 집적화 및 효율성 극대화를 통해 문화예술의 상생발전과 함께 보존 전승의 맥을 잇는 기반을 구축

사업개요

❍ 사업기간 : 2013 ~2016(4년)

❍ 위    치 : 익산시 모현동 모인근린공원 일원(김동문 배드민턴장 인접)

❍ 사업규모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

❍ 총사업비 : 82억원 (국비33 / 도비24.5 / 시비24.5(특별교부세 포함))

❍ 사업내용 : 무형문화 전수 및 시민참여 문화공간, 실내․외 공연장 등

▸제11-3호 이리농악, 제83-2호 이리향제줄풍류, 시립국악원(풍물단 포함) 통합

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	8,200	3,650	1,670	2,880
국 비	3,300	1,650	500	1,150
도 비	2,450	1,150	435	865
시 비	1,950	350	735	865
기 타	500	500(특교세)

’15년까지 추진실적

❍ 익산시 신규투자사업 타당성 심의완료(적정)	2012. 05. 31.

❍ 전북도 지방재정투융자 심사완료	2012. 07. 13.

❍ 2013 ~ 2016년 익산시 중기지방재정반영	2012. 09. 07.

❍ 의회 공유재산관리계획 승인	2012. 12. 20.

❍ 익산시 설계심의 위원회 심의 완료	2014. 02. 19.

❍ 건축 등 인허가 완료	2014. 04. ~ 05.

❍ 문화재청 설계심사 완료	2014. 05. 28.

❍ 공사착공(장기계속사업)	2014. 10. 08.

향후 추진계획

❍  내․외부 마감공사, 전통건축공사, 부대공사 완료 : 2016. 8월

기대효과(사업효과)

❍ 연중 일반인, 대학생 등 전수 교육을 실시하는 전수관의 시설 노후 및         열악한 환경 ☞ 지역 중요 문화유산의 단절위기

▸ 이리농악 전수관 1991년 건립․운영되어 현재 24년 경과 ☞ 노후 심각

▸ 이리향제줄풍류 전수관은 신동사무소내에 위치하여 공간 활용 및 주민자치 활동과 마찰

❍ 전통문화의 산재와 도태 위기로 지역 무형문화유산의 체계적 관리 필요

조감도

(담당부서 : 역사문화재과  계장 : 배석희  담당자 : 조용섭 ☎ 859-5792)

7		소라산 공원 조성사업

❖ 사업 목적 - 도심내 쾌적한 휴식공간 및 가족단위 여가활용 공간 마련

사업개요

❍ 사업기간 : 2009 ~ 2018년

❍ 위    치 : 영등동 528번지 일원

❍ 사업규모 : 81,331㎡(영등지구 55,000㎡ ,남중지구 26,331㎡)

- 소라산 자연마당 조성(영등지구) - 55,000㎡

❍ 총사업비 : 15,000백만원(국비 3,000  시비 12,000)

❍ 사업내용 : 생태관, 산책로. 생태습지, 운동시설 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	15,000	6,944	4,165	820	3,071
국 비	3,000		3,000
도 비
시 비	12,000	6,944	1,165	820	3,071
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 편입토지 및 지장물 손실보상 ------------------------- 2009. 06. ~ 2015. 11.

❍ 소라산 자연마당 조성사업 추진 ----------------------- 2014. 11. ~ 2015. 12.

향후 추진계획

❍ 소라산 공원(영등지구) 화장실 조성 설계용역 -------- 2016.04. ~ 2016.08.

❍ 소라산 공원(영등지구) 화장실 조성사업 추진 -------- 2016.08. ~ 2017.06.

❍ 소라근린공원(남중지구) 조성계획변경 및 설계용역 -------- 2016.08. ~ 2017.12.

기대효과(사업효과)

❍ 소라산의 생물다양성 증진으로 도시 생태계의 건전성 향상

❍ 생태 휴식 공간 조성으로 도시민의 쾌적한 삶의 질 향상 도모

관련사진 첨부 (소라산 자연마당 조성사업 조감도)

(담당부서 :  산림공원과  계장 : 양경진  담당자 : 배진호  ☎ 859 –5892 )

8		황등 지역형 노인복지관 및 도서관 건립

❖ 도농 복합도시로서 소외된 농촌지역 정주여건 개선 및 독서교육 환경 조성으로 문화격차 해소

❖ 어르신들의 활기찬 여가 생활 제공 및 주민편익 증진으로 황등 지역 주민 복지 증진 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 5. ∼ 2015. 12.

❍ 위    치 : 익산시 황등면 황등8길 7(황등리 917-3)

❍ 사업규모 : 부지 2,694㎡  연면적 941.24㎡(지상2층)

❍ 총사업비 : 1,800백만원(국비 1,098백만원 시비 702백만원)

❍ 사업내용 : 황등 지역형 복합문화시설 신축

‣ 1층 노인종합복지관, 2층 도서관

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	1,800 (1,724)	93 (93)	1,707 (1,631)
국 비	1,098 (1,098)	93 (93)	1,005 (1,005)
도 비
시 비	702 (626)	0	702 (626)

’15년까지 추진실적

❍  기부체납(황등산업) 토지 등기완료(2,694㎡)       : 2011. 4.

❍ 공유재산관리계획 승인                       : 2012. 11.

❍ 실시설계 완료[(유)영화건축사사무소]             : 2014. 5. 8.

❍ 공사 착공                                      : 2014. 7. 10.

❍ 1차 공사중지(건축부지 생활폐기물 처리)          : 2014. 7. 11. ~ 11. 3.

❍ 동절기 공사중지                                : 2015. 1. 2. ~  3. 1.

❍  공사 준공                                     : 2015. 12. 16.

❍ 황등도서관 임시 운영                           : 2016. 07. ~

향후 추진계획

❍  황등 노인종합복지관 및 도서관 운영            : 2016. 8. ~

기대효과(사업효과)

❍ 문화소외지역에 독서문화공간 확충으로 독서활성화 기대

❍ 농촌지역 어르신들의 활기찬 노후 생활 영위 및 주민편익 증진으로     문화 예술 욕구 충족

관련사진 첨부

(담당부서 : 경로장애인과 계장 : 박남섭  담당자 : 박남섭 ☎ 859 - 5342)

(담당부서 : 시립도서관   계장 : 박철순   담당자 : 정현숙 ☎ 859–3470)

9		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

❖ KTX 익산역 주변 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

❖ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

사업개요

❍ 사업기간 : 2015~2018년(4년)

❍ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

❍ 사업규모 : 약 35,000㎡

❍ 총사업비 : 6,624백만원(국비 4,368,  도비 616,  시비 1,640)

❍ 사업내용 : 안전확보, 생활∙위생인프라, 주택정비지원, 휴먼케어, 주민역량

강화사업 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	6,624		1,571	1,414	3,639
국 비	4,368		1,100	990	2,278
도 비	616		141	127	348
시 비	1,640		330	297	1,013
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 착수              :  2015. 11. 16

❍ 우선사업(도로개설) 실시설계용역 착수                :  2015. 11. 24

❍ 우선사업(도로개설) 토지보상 열람공고 완료	:  2015. 12. 29

향후 추진계획

❍ 우선사업(도로개설) 토지매입                         :  2016. 03 ~

❍ 새뜰마을사업 마스터플랜 승인(지역발전위원회)        :  2016. 08

❍ 세부사업별 사업추진                                 :  2016. 09~

기대효과(사업효과)

❍ 정주환경이 열악한 KTX 익산역 주변 지역의 생활여건을 개선하여 지역

주민의 삶의 질 향상 도모

❍ KTX 개통과 연계하여 역세권 지역의 가로환경 개선 및 녹지 정비로 시

이미지 개선 및 지역경제 활성화 도모

관련사진 첨부

사업대상지

익산역

(담당부서 : 도시개발과   담당 : 도시재생계장 나창균   담당자 : 소범섭 ☎859-4563)

10		여산면소재지 종합정비사업

❖ 생활편익, 문화·복지시설 등의 확충을 통한 농촌 주민들의 정주서비스 기능 충족 및 농촌 지역의 중심거점 공간 육성으로 지역주민 삶의 질 향상 기여

사업개요

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2016년

❍ 위    치 : 전라북도 익산시 여산면 여산리 일원

❍ 사업규모 : 법정리 1개, 행정리 6개(교창, 동촌, 서총1·2, 영전, 유성)

❍ 총사업비 : 7,000백만원(국비 4,900  도비 1,050  시비 1,050)

❍ 사업내용

- 기초생활기반 : 가람어울림센터, 체육공원, 만남의광장, 통학로 인도, 천변산책로조성, 이병기생가탐방로

- 지역경관개선 : 중심가로정비, 중심상가 간판정비, 재래시장정비

- 지역역량강화 : 교육 및 견학, 홍보마케팅, 컨설팅, 정보화구축 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	7,000	5,762	601	637
국 비	4,900	4,033	314	553
도 비	1,050	864.5	185.5
시 비	1,050	864.5	101.5	84
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 신규사업 선정(농림축산식품부)	: 2011. 11.

❍ 기본계획 수립용역 시행	: 2012.  4.

❍ 읍면발전협의회 개최	: 2012. 12.

❍ 기본계획 수립 및 승인	: 2013.  3.

❍ 시행계획 및 실시설계 용역 착수	: 2013.  4.

❍ 지역역량강화사업 시행	: 2014.  4.

❍ 시행계획 수립	: 2014.  8.

❍ 소재지 종합정비사업 착공	: 2014.  9.

❍ 시행계획 변경 승인(1차)	: 2015.  8. 17.

❍ 시행계획 변경 승인(2차)	: 2015. 12. 29.

향후 추진계획

❍ 사업준공 및 시설물 인계인수	: 2016.  6.

❍ 시설물 운영	: 2016.  7.

기대효과(사업효과)

❍ 농촌의 다원적 기능 확충을 통한 농촌다움의 유지·보전 등 지역주민의 삶의 질 향상

❍ 교육, 문화, 복지시설 등의 불특정 다수 주민이 이용 가능한 적정수준의 시설 확충을 통하여 읍·면소재지의 거점기능 강화

사업계획평면도

완료전경

가람어울림센터	체 육 공 원

만남의 광장	통학로 인도
천변산책로	중심가로정비
재래시장 정비	중심상가 간판정비

(담당부서 : 농업정책과     담당 : 전민호     담당자 : 김용환  ☎ 859 – 5780)

11		국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축

❖ 기업하기 좋은 연구□생산□지원 공간과 환경을 구축하여 입주기업의 성장활동을 도모할 수 있는 6대 기업지원시설 건립

사업개요

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2016

❍ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(S1부지)

❍ 사업규모 : 건축연면적 28,705㎡(지하 1층, 지상 5층)

❍ 총사업비 : 64,836백만원

❍ 사업내용 : 6개 H/W시설 구축(지원센터, 기능성평가센터, 품질안전센터, 패키징센터, 파일럿플랜트, 벤처센터)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	64,836	51,371	9,951	3,514
국 비	32,418	29,161	1,500	1,757
도 비	9,725	8,748	450	527
시 비	22,693	13,462	8,001	1,230
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 건축 기본□실시설계 및 건축허가 완료	: `13. 12.

❍ 녹색건축 및 에너지효율등급	: `14.  2.

❍ 시공사(건축, 전기, 통신, 폐기물) 선정	: `14.  5.

❍ 정부기업지원시설 공사착공	: `14.  7.

❍  임시연구소 구축·운영(2개소: 원광대, 전북대 익산캠퍼스)   : ‘14. 10. ~

향후 추진계획

❍  정부기업지원시설 준공                              : ‘16.  9.

❍  국가식품클러스터지원센터 이전·운영                 : ‘16.  9.

기대효과(사업효과)

❍ 입주기업에 대한 지원체계 구축으로 국가식품클러스터를 글로벌 식품시장의 新중심으로 육성

❍ 농수산물의 판로확대로 농어업인 소득증대에 기여함은 물론 농산물의 부가가치 제고로 농어업 성장 견인

❍ 국가식품클러스터 조성에 따른 직간접 고용효과 22천명이며, 경제적 생산 유발효과는 4조원 기대

관련사진 첨부

(담당부서 : 식품클러스터지원과  계장 : 박갑수   담당자 : 정상희 ☎ 859-3972)

12		유천 생태습지 및 생태하천 복원사업

❖ 하천의 수생태 복원 및 생물종 다양화를 통해 쾌적한 하천환경조성을 통한 친수기능 회복과 지역주민에게 쾌적한 생활공간을 제공

❖ 환경기초시설 밀집지역의 수질개선을 통해 만경강의 오염부하량 저감

사업개요

❍ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2015. 11

❍ 위    치 : 익산시 금강동 993-1번지 일원

❍ 사업규모 : 생태하천 1.3km, 생태습지 134,521㎡

❍ 총사업비 : 28,550백만원

❍ 사업내용 : 생태 하천 및 생태습지 조성(자연생태학습장 조성)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015년	2016년 편성액	2017년이후
계 (집행액)	28,550	27,176	1,374
국 비	14,061	14,061
도 비
시 비	14,489	13,115	1,374
기 타

’15년까지 추진실적

❍ 생태하천복원사업 타당성조사 용역 실시 : 2008. 04. 14. ~ 2008. 09. 11.

❍ 도시계획시설(유수지151,700㎡)결정      : 2010. 07. 02.

❍ 실시설계 용역 추진                    : 2010. 12. 21. ~ 2012. 07. 24.

❍ 공사 착공	: 2012. 11. 06.

❍ 동산동 발전위원회 간담회, 주민설명회 개최  : 2012. 11. ~ 2013. 02.

- 주민자치센터 건립 부지 확보 요구

❍ 생태하천복원사업 예산 조정                : 2014. 4. 30.

- 동산동 주민자치센터 부지 확보에 따른 사업부지 조정

❍ 2차분 준공	: 2014. 07. 21.

❍ 3차분(최종) 준공                           : 2015. 11. 02.

향후 추진계획

❍  시설물 유지관리                          : 2015. 12. ~ 계속

기대효과(사업효과)

❍  하천 오염부하량 감소와 수생태 건강성 회복

❍ 친환경 수변공간 조성으로 환경기초시설 밀집으로 인한 지역주민에 휴식처 제공

❍  지역주민에 자연친화적인 생태학습장 제공

관련사진 첨부

(담당부서 : 하수도과      계장 :  양기주   담당자 : 신성철   ☎  859  - 4467)