2018년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2017년도】                                 (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
1	국가식품클러스터 소스산업화센터 건립	-사업기간: 2017년 ~ 2021년 -총사업비: 10,223백만원 -사업규모: 부지 6,537.6㎡, 건축 1,036.74㎡ -사업내용: 소스산업화센터 건립·운영	국가식품 클러스터담당관
2	전국체전시설 건립	-사업기간: 2015 ~ 2018 -총사업비: 37,479 -사업규모: 익산종합운동장 포함 종목별 경기장 -사업내용: 익산종합운동장 포함 15개 종목별 경기장 개보수	전국체전담당관
3	모현지구 우수저류시설 설치사업	-사업기간: 2014~2017 -총사업비: 16,523백만원 -사업규모: 우수저류시설(15,000㎥) -사업내용: 우수저류시설1개소	시민안전과
4	함라한옥체험단지조성	-사업기간: 2007~2018 -총사업비: 10,500백만원 -사업규모: 숙박시설 332㎡ -사업내용: 숙박시설, 체험관, 홍보관	문화관광과
5	미륵사지관광지조성	-사업기간: 2007~ 2021 -총사업비: 32,498 -사업규모: 108,743㎡ -사업내용: 미륵사지 관광지 조성	문화관광과
6	귀금속보석클러스터 조성	-사업기간: 2012. ~ 2018. -총사업비: 18,612(국비 13,012, 시비 5,600) -사업규모: 건축 2동(지상3층) -사업내용: 디자인센터 및 아파트형 공장 신축, 장비구축	한류패션과
7	서부권역 다목적 체육관 건립	-사업기간: 2018년 ~ 2019년 -총사업비: 96.5억원 -사업규모: 연면적 4,690㎡(지하1층, 지상3층) -사업내용: 수영장(어린이풀장포함), 다목적 체육관 건립	체육진흥과

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
8	새만금바이오순환림 조성사업 (휴․폐업축사 매입)	-사업기간: 2010년 ~ 2018년 -총사업비: 21,250백만원 -사업규모: 217,673㎡ -사업내용: 휴,폐업축사 협의매입	녹색환경과
9	군도 23호선 도로확포장공사	-사업기간: 2013. 6 ~ 2019. 12 -총사업비: 12,500백만원 -사업규모: 도로확포장(2차로→4차로) -사업내용: 편입토지 손실보상 및 도로 확포장공사	건설과
10	보건소 증축 및 개보수	-사업기간: 2017. 1. ~ 2018. 6. -총사업비: 2,982백만원 -사업규모: 증축 658.32㎡, 개보수 3,292.0㎡ -사업내용: 사업기능에 따른 사무실 재4치	보건소

1		국가식품클러스터 소스산업화센터 건립

❖ 세계 소스시장은 지속 성장 중으로 국내 소스기업은 신규시장 개척에 한계가 있어 체계적으로 지원할 수 있는 기반 마련 필요

사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(I21)

❍ 사업규모 : 부지 6,537.6㎡, 건축 1,036.74㎡

❍ 총사업비 : 10,223백만원(국비 7,900, 도비 300, 시비 2,023)

❍ 주요기능

▸ 소스산업 정보센터(레시피, 수출 및 산업정보 등) 구축

▸ 중소식품기업 애로기술 해소 지원 및 주문자 수요 시제품 생산지원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	10,223	200	8,023	500	1,500
국 비	7,900	200	6,700	250	750
도 비	300	-	-	75	225
시 비	2,023	-	1,323	175	525
기 타

’17년까지 추진실적

❍ 농식품부 사업추진 결정 및 입지 확정                  : 2016. 6.  2

❍ 소스산업화센터 기본계획 시달                         : 2016. 6. 28

❍ 2016년 설계용역비 예산(2억) 확정                      : 2016. 8. 29

❍ 2016년 제4차 지방재정 투자사업 도심사(조건부 추진)    : 2016. 10. 28

❍ 2017년 공유재산관리계획(안) 심의(의회, 원안가결)       : 2016. 11.  7

❍ 2017년 국가예산 확정 내시(67억)                       : 2016. 12.  6

❍ 2017년 소스산업화센터 건립지원 사업계획 승인         : 2017. 4. 10

❍ 소스산업화센터 개념설계용역                        : 2017. 2. ~ 6.

❍ 2017년 산학연 네트워크 자문위원회(1차/2차/3차)       : 2017. 8. ~ 10.

❍ 소스산업화센터 기본  및 실시설계용역                : 2017. 10. ~ 2018. 5.

❍ 소스산업화센터 부지 매매계약 체결(익산시, LH공사)   : 2017. 12. 20

향후 추진계획

❍ 2018년 산학연 네트워크 자문위원회(1차)                : 2018. 3.

❍ 소스산업화센터 국제 심포지엄 개최                    : 2018. 6.

❍ 소스산업화센터 건립공사 발주 의뢰(조달청)             : 2018. 6.

❍ 소스산업화센터 홈페이지·정보구축 용역            : 2018. 7. ~ 12.

❍ 소스산업화센터 건립공사 착공                         : 2018. 8.

❍ 소스산업화센터 건립공사 준공 및 기계장비 구축        : 2019. 5.

❍ 소스산업화센터 운영                                  : 2019. 6.

기대효과(사업효과)

❍ 소스 R&BD 네트워킹 HUB, 소스 ODM 등의 기능 수행

❍ 우수 소스장비 활용하여 기업의 애로사항 및 요구사항 해소

❍ 소스산업 발전을 위한 산․학․연․관 네트워크 중심으로의 역할 수행

❍ 소스 제품 및 원료 DB 구축, 전문·기술자료 관리하여 기업에게 정보 제공으로 중소 소스기업 지원

위치도

(담당부서 : 국가식품클러스터담당관 담당 : 박갑수 담당자 : 박주영 ☎ 859-3966)

2		전국체전시설건립

❖ 체육시설 리모델링을 통한 양대체전 성공개최 및 인프라 확충

❖ 완벽한 전국체전 준비로 우리 시 이미지 제고

사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 10.

❍ 위    치 : 익산시 무왕로 1397 익산종합운동장 외 종목별 경기장

❍ 사업규모 : 익산종합운동장 포함 종목별 경기장

❍ 총사업비 : 37,479백만원

❍ 사업내용 : 익산종합운동장 포함 15개소 경기장 개보수

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	37,479	10,154	26,350	975	-
기 금	11,311	3,046	8,013	252	-
도 비	9,987	3,554	6,245	238	-
시 비	16,131	3,554	12,092	485	-
기 타	-	-	-	-	-

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 익산종합운동장 개선공사 착공 : 2017. 3.

❍ 익산종합운동장 LED 전광판 설치 : 2017. 12.

❍ 익산종합운동장 진입로 정비공사 예산 확보 : 2017. 11.

❍ 전국체전 종목별 경기장 중앙 경기단체 사전실사 : 2017. 10. ~ 12.

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍ 전국체전 육상경기장 제1종 공인 완료           : 2018. 7.

❍ 익산종합운동장(실내체육관 포함) 개선공사 준공 : 2018. 8.

❍ 전국체전 종목별 경기장 개선공사 준공        : 2018. 8.

❍ 전국체전 대비 시범운영 및 프레대회 개최      : 2018. 8. ~ 9.

❍ 제99회 전국체전 및 제38회 전국장애인체전 개최 : 2018. 10. 12. ~ 10. 29.

기대효과(사업효과)

❍ 체전개최로 성숙한 시민의식 향상 및 지역경제 활성화

❍ 노후 체육시설 개선으로 시민 체육 공간 확충

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

위 치 도	조 감 도

진 행 사 진	완 료 사 진

( 담당부서 :  전국체전담당관  담당 : 김경식  담당자 : 임방엽   ☎ 859-7662 )

3		모현지구 우수저류시설 설치사업

❖ 기상이변에 따른 돌발성 집중호우를 대비하여 재해의 예방 및 저감을 위해 우수저류시설을 설치하여 시민의 재산과 생명을 보호

사업개요

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2017

❍ 위    치 : 모현동 1가 180번지 일원

❍ 사업규모 : 우수저류시설(저류용량 15,000㎥)

❍ 총사업비 : 16,523백만원

❍ 사업내용 : 우수저류시설 1개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	16,523	16,523	0	0	0
국 비	8,262	8,262	0	0	0
도 비	2,478	2,478	0	0	0
시 비	5,783	5,783	0	0	0
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍  공사 착공                                          : 2015. 07

❍  공사 준공                                          : 2017. 12

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍  해당없음

기대효과(사업효과)

❍  주민의 소중한 재산과 생명을 보호

관련사진 첨부

(담당부서 :  시민안전과    담당 : 재난방재   담당자 : 김영진  ☎  859 - 5952 )

4		함라 한옥체험단지 조성사업

❖ 함라 지역의 전통 문화, 함열향교 및 삼부잣집을 연계하는 관광자원을 마련하여 지역경제활성화 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2007년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 익산시 함열리 572-1번지 일원

❍ 총사업비 : 1,500백만원

❍ 사업내용 : 함라노소 106㎡, 숙박동 332㎡(3개동 10실), 홍보관 59㎡, 체험관(2개동) 403㎡, 부대시설(화장실, 찻집 등) 119㎡

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	10,500	8,300	2,200
국 비	3,250	2,150	1,100
도 비
시 비	7,250	6,150	1,100
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 지방재정 투융자심사(전북도)         : 2007. 11. 02.

❍ 공유재산 관리계획 심의의결        : 2008. 07 ~ 2013. 03.

❍ 편입토지 등 협의 취득                : 2009. ~ 2012.

❍ 1단계사업 완료                       : 2013. 03. ~ 2014. 06. 16.

(주차장, 공원, 부지조성, 토지매입 37필지 17,081㎡, 지장물 보상)

❍ 2단계사업 완료                       : 2015. ~ 2016. 12

(숙박동 2개동 7실 246㎡, 대문채 100㎡, 18㎡)

❍ 3단계사업 완료                       : 2016 ~ 2017. 11.

(함라노소 106㎡, 숙박동 1개동 3실 86㎡, 홍보관 59㎡)

❍ 체험관 2개동 403㎡ 공사 착수           : 2017. 8.

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍  체험관 2개동 403㎡ 공사완료   : 2018. 09.

❍  함라노소 화장실 증축 30㎡, 전통담장 200m 공사 : 2018. 8. ~ 11.

기대효과(사업효과)

함라면에 산재해 있은 함열향교, 삼부잣집 등 전통 한옥문화유산과 연계한 한옥체험단지를 조성하여 관광객들에게 한옥숙박, 음식, 한복, 염색 및 떡 만들기 등의 다양한 체험을 할 수 있는 문화ㆍ관광 공간 제공

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 문화관광과     담당 : 김학성      담당자 : 박정혁  ☎ 859 – 5873)

5		미륵사지 관광지 조성

❖ 백제문화의 대표적 관광지인 미륵사지의 이미지 강화 및 관광산업 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2007년 ~ 2021년

❍ 위    치 : 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

❍ 사업규모 : 108,743㎡

❍ 총사업비 : 32,498백만원

❍ 사업내용 : 전통음식점, 광장, 주차장, 자연지형공원, 경관녹지 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	32,498		2,000	500	11,220
국 비	5,127	-	1,000	500	3,627
도 비
시 비	9,571 (15,800)	(15,800)	1,000 (0)	500 (0)	8,071 (0)
기 타	2,000				2,000

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인      : 2007. 11.

❍ 편입토지 및 지장물 매입(97%)            : 2007. ~

❍ 행정절차 추진                           : 2017. 01

▸문화재현상변경, 교통영향평가, 실시설계용역, 문화재 발굴조사 등

❍ 문화재 발굴조사(1지구) 완료            : 2017. 12.

❍ 관광지 조성사업 실시설계용역 추진     : 2018. 2~

❍ 미륵사지 관광지 조성계획 변경 승인    : 2018. 06.

❍ 지방재정 투자 심사 승인(조건부)        : 2018. 07.

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍  미륵사지 관광지 디자인 심의 및 지역심의(익산시)   : 2018. 07.

❍  관광지 내 보상추진(영업보상 및 주거이전비 등)     : 2018. 08.

❍  미보상 토지 수용 및 지장물 철거                  : 2018. 09.

❍ 문화재 시굴조사(2,3,4)지구                         : 2018. 10.

❍ 관광지 조성사업 착공                             : 2018. 11.

❍ 관광지 조성사업 완료                             : 2021.

기대효과(사업효과)

❍  2015년 유네스코 세계유산에 등재됨에 따라 국가지정 사적지인 미륵사지에 대한 역사문화 환경을 보전하면서, 현재 무질서하게 개발되어 있는 기존 건축물의 철거를 통해 난개발 방지 및 관광객에게 쾌적한 관광환경을 제공하고자 함

❍ 넓게는 백제시대 핵심유적지인 왕궁리유적 일대와 익산쌍릉 등과 연계하고 미륵사지 관광지 인근으로 국립익산박물관(2019년 12월 개관), 익산 미륵사지 전면부 광장을 조성(2020년 목표)하는 계획과 연계 정비하여 백제 문화 고도 익산의 정체성 확립하고 역사문화 교육 기회의 장 제공

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 문화관광과     담당 : 김학성      담당자 : 정웅  ☎ 859 – 5272)

6		귀금속보석 클러스터 조성사업

❖아파트형공장과 디자인센터 구축으로 기획·디자인·생산·판매·전시기능과 함께 관광기능까지 연결된 클러스터 구축으로 보석산업 경쟁력 강화

사업개요

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2018.

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 동용리 768번지

❍ 사업규모 : 대지면적 12,734㎡ / 건축규모 : 2동 지상3층

❍ 총사업비 : 18,612백만원(국비 13,012 시비 5,600)

❍ 사업내용 : 아파트형 공장(26실) 및 디자인센터 신축, 장비구축

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	18,612	13,831	1,912	2,869
국 비	13,012	8,831	1,312	2,869
도 비	-	-	-	-
시 비	5,600	5,000	600	0
기 타	-	-	-	-

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 사전준비단계

▸타당성조사, 중기지방재정계획, 국고보조사업 확정     : 2011년도

▸지방재정 투융자심사(중앙심사), 공유재산취득승인     : 2012년도

❍ 설계용역 및 공사단계

▸설계 용역                                          : 2014. 01.~07.

▸건축공사 착공 및 건축 감리용역 착수                : 2014. 12.

▸공사 일시 중지                                     : 2015. 02.

▸공사 재개(건축 도급자 변경)                         : 2016. 07.

▸건축·전기·통신·소방공사 준공                        : 2017. 12.

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍ 부대공사(CCTV설치 및 연결다리 차양 설치 등)        : 2018. 01.~04.

❍ 전북디자인센터 설립 관련 업무 협약                  : 2018. 02.

❍ 전북디자인센터 입주 및 개소식                       : 2018. 04.

❍ 사무 및 교육용 기자재 구입                          : 2018. 05.

❍ 귀금속장비 등 구축                                  : 2018. 06.~12.

기대효과(사업효과)

❍ 디자인센터는 귀금속보석산업 디자인개발, 제품개발 지원 기능을 담당하며, 이와 함께 아파트형공장은 생산기능을 맡고 있어 기획·디자인·생산·판매·전시기능과 함께 관광기능까지 연결된 귀금속보석산업 클러스터 구축으로 경쟁력 강화

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 한류패션과   계장 : 강동혁    담당자 : 변민우 ☎ 859 - 4384)

7		서부권역 다목적 체육관 건립

❖ 택지개발에 따라 유입된 서부권역 시민들의 건강 증진 및 생활 체육

활성화를 통한 지역 주민들의 건강 증진 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 익산시 모현동2가 267-1번지 일원(배산근린공원 내)

❍ 총사업비 : 96.5억원(국비 28.95, 도비 30.00, 시비 37.55)

❍ 사업내용 : 대지면적 9,544㎡, 연면적 4,690㎡정도(지하1층, 지상3층)

▸ 지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸ 지상1층 : 수영장(어린이풀장 포함), 다목적 체육관 등

▸ 지상2층 : 사무실, 교육실, 체력단련실 등

▸ 지상3층 : 노인보건시설(보건소 진료실, 물리·재활치료실 등)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	9,650		3,000	2,255	4,395
국 비	2,895			1,500	1,395
도 비	3,000		2,000		1,000
시 비	3,755		1,000	755	2,000
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 지방재정 투자심사 이행	: 2017. 6.

❍ 공유재산 심의 이행	: 2017. 9.

❍ 중기지방재정계획 수립	: 2017. 10.

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍ 설계공모 및 작품 선정	: 2018. 1. ~ 4.

❍ 건축설계 용역 및 공원조성계획 변경	: 2018. 5. ~ 10.

❍ 건축공사 착공 및 준공	: 2018. 11. ~ 2019. 12.

기대효과(사업효과)

❍ 서부권역 시민들의 건강 증진 및 생활체육 활성화를 통한 지역 주민들의 건강 증진 도모

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 체육진흥과    담당자 : 정용복 ☎ 859-5872)

8		새만금바이오순환림 조성사업(휴․폐업축사 매입)

❖ “왕궁정착농원 환경개선 종합대책('10.7.)”에 따라 정착농원 내 가축분뇨 오염원의 근원적 제거로 정착농원 환경개선 및 새만금상류 수질 개선

사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원 3개 정착촌 내

❍ 사업규모 : 217,673㎡

❍ 총사업비 : 21,250백만원(도비 4,100, 시비 17,150)

❍ 사업내용 : 휴․폐업축사 협의 매입

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	21,250	15,550	3,200	2,500
국 비
도 비	4,100	2,000	1,200	900
시 비	17,150	13,550	2,000	1,600
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ “왕궁정착농원 환경개선 종합대책” 발표	: 2010.  7.

❍ 특별관리지역 지정 고시('11년~15년, 폐업 218천㎡ 매입)	: 2011. 1. 1.

❍ 특별관리지역 지정 연장 고시('16년~'17년까지)	: 2016. 1. 25.

❍ 특별관리지역 지정 연장 재고시('18년까지)	: 2018. 1. 24.

❍ 연도별 매입 실적

계	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018 (계획)
217,673	79,507	38,701	19,115	30,438	9,906	22,561	17,445

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지 구체적으로)

❍ 휴․폐업축사 매입신청 접수	: 2018.  2.

❍ 지장물 조사 및 물건조서 작성	: 2018.  3. ~ 4.

❍ 감정평가 실시	: 2018.  5.

❍ 매매계약 체결 및 소유권 이전	: 2018.  8. 30.한

❍ 매매대금 지급	: 2018.  9. 15.

❍ 주거이전 완료 및 사업마무리	: 2018. 12. 31.

기대효과(사업효과)

❍ 축산오염원의 근원적 제거로 새만금상류 수질 개선으로 국책사업의 성공적 추진

❍ 왕궁정착농원의 열악한 정주여건 개선으로 한센인의 삶의 질 향상

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 녹색환경과     계장 : 오현호    담당자 : 진성재   ☎063-859-4531)

9		군도23호선 도로확포장공사

❖ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열-삼기간 교통수요 증가에 대비하고

교통의 원활한 소통 및 안전하고 쾌적한 도로기반시설 조성으로 물류수송 비용 절감을 통한 지역경제 활성화 기여

사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 6 ~ 2019. 12

❍ 위    치 : 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기 일반산업단지

❍ 사업규모 : 도로확포장 L=3.4㎞, B=16.5~20.5m(2차로 → 4차로)

❍ 총사업비 : 12,500백만원

❍ 사업내용 : 편입토지 손실보상 및 도로확포장공사 1식

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	12,500	1,420	4,800	2,300	3,980
국 비
도 비
시 비	12,500	1,420	4,800	2,300	3,980
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 지방재정 투융자 심사	: 2013.  6

❍ 실시설계 용역	: 2013.  7 ~ 2015.  1

❍ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2016.  5 ~ 2017. 12

향후 추진계획(18년 ~ 준공시까지)

❍  잔여 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2018.  1 ~ 12

❍  확.포장공사 추진	: 2018.  5 ~ 2019. 12

기대효과(사업효과)

❍  기반시설 확충에 따른 시민의 삶의 질 향상

❍ 삼기일반산업단지 교통여건 개선으로 물류 수송비용 절감

❍  북부권 도로망 구축으로 지역균형발전 도모

위 치 도

(담당부서 : 건설과   도로시설계장 : 이용재   담당자 : 박춘수 ☎859-5536)

10		보건소 증축 및 개보수

○ 건물의 노후화 및 진료공간 협소로 이용시민 불편 초래, 건물 유지·관리비 과다 소요

○ 비만, 영양, 운동 등 비만환자 증가에 따른 양질의 의료서비스 제공을 위한 통합형 보건시설 확충

사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 6.

❍ 위    치 : 익산시 신동 142-8

❍ 사업규모 : 증축 658.34㎡,  개보수 3,292.0㎡

❍ 총사업비 : 2,982백만원

❍ 사업내용 : 소회의실 및 영양사업실 설치, 사업기능에 따른 공간재배치

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계 (집행액)	2,982		2,982
국 비	1,471		1,471
도 비	368		368
시 비	1,143		1,143
기 타

’17년까지 추진실적 (구체적으로)

❍ 2017 농어촌의료서비스개선사업 신청                 : 2016. 7.

❍ 공유재산심의회 심의                                : 2016. 11.

❍기본 및 실시설계                               : 2017. 3. ~ 10.

▸용 역 사 : 가인건축사사무소

▸용역기간 : 2017. 3. 27 ~ 10. 20

▸용 역 비 : 88,150천원

❍공사추진                            : 2017. 11. 22 ~ 2018. 6. 30.

▸시 공 사 : ㈜벽천종합건설외 3개사

기대효과(사업효과)

❍ 민원업무를 신속하고 편리하게 처리

❍ 시민들에게 쾌적하고 안락한 건강쉼터 제공

관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 보건지원과  담당 : 보건행정계장  담당자 : 김학언  ☎ 859-4807 )