2019년(2018회계연도) 재정공시 대상사업 목록

(기준년도 : 2018년도)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
1	소스산업화센터 건립	-사업기간: 2017년~2021년(5년) -총사업비: 10,223백만원 -사업규모: 부지6,537.6㎡, 건축1,036.74㎡ -사업내용: *소스산업정보센터(레시피, 수출 및 산업정보 등) 구축	국가식품클러스터 담당관
2	마동 주민자치센터 신축	-사업기간: 2016.6.10.~2018.3.26. -총사업비: 5,690백만원 -사업규모: 지상 4층, 연면적 1,968.6㎡ -사업내용: 주민센터 신축	회계과
3	동산동 주민자치센터 신축	-사업기간: 2016.6.10.~2018.2.16. -총사업비: 6,154백만원 -사업규모: 지상 4층, 연면적 2,359.78㎡ -사업내용: 주민센터 신축	회계과
4	관광지개발(왕궁보석테마 대표관광지 육성사업)	-사업기간: 2015~2019 -총사업비: 7,150백만원 -사업규모: 160,460㎡ -사업내용: 대표관광지 기반시설,진흥사업	문화관광산업과
5	전국체전시설건립	-사업기간: 2017. 3. ~ 2018. 9. -총사업비: 37,099백만원 -사업규모: 익산종합운동장 포함 14개 경기장 개보수 1식 -사업내용: 익산종합운동장 포함 종목별 경기장 개보수	체육진흥과
6	공공체육시설 장애인 편의시설 설치사업	-사업기간: 2017. 3. ~ 2018. 9. -총사업비: 2,137백만원 -사업규모: 익산종합운동장(실내체육관 포함) 장애인 편의시설 1식 -사업내용: 익산종합운동장 내 장애인 편의시설(경사로 등) 설치	체육진흥과

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업부서	비 고 (페이지)
7	국내복귀 촉진을 위한 임대형공장 조성	-사업기간: 2018.1. ~12. -총사업비: 3,794백만원 -사업규모: 2동, 1층, 연면적 합계 2392㎡ -사업내용: 주얼리 임대공장 건립	한류패션과
8	천년초권역단위종합개발	-사업기간: 2014~2019 -총사업비: 4,124백만원 -사업규모: 익산시 성당면 갈산리 일원 -사업내용: 천년초체험관, 마을회관, 경관정비, 컨설팅 등	농촌활력과
9	바이오순환림조성사업 (휴․폐업축사매입사업)	-사업기간: 2010년 ~ 2018년 -총사업비: 21,305백만원 -사업규모: 221,008㎡ -사업내용: 휴․폐업축사 협의 매입	녹색환경과
10	동부 건강생활지원센터 신축	-사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 8. -총사업비: 2,794백만원 -사업규모: 동부 건강생활지원센터 신축 804.15㎡(지상2층) -사업내용: 건강증진실, 프로그램실 등 신축	보건지원과

1		소스산업화센터 건립

❖ 사업 목적

▸ 발효 원료 기반 소스산업 지원을 통한 미래 동반 신성장 산업 육성을 위한 기반 마련

사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년 (5년)

❍ 위    치 : 익산 왕궁면 광암리 1426

❍ 사업규모 : 부지 6,537.6㎡(1,977평), 건축 1,036.74(313평)

❍ 총사업비 : 10,223백만원(국비 7,900, 도비 300, 시비 2,023)

❍ 사업내용

▸ 소스산업 정보센터(레시피, 수출 및 산업정보 등) 구축

▸ 중소식품기업 애로기술 해소 지원(R&BD 네트워킹)

▸ 주문자 수요 시제품 생산지원 (ODM방식)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2017년이전	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	10,223	8,223	500	500	1,000
국 비	7,900	6,900	250	250	500
도 비	300		75	75	150
시 비	2,023	1,323	175	175	350
기 타

’18년까지 추진실적

❍ 소스산업화센터 개념설계 용역                   : ‘17.  2. ~ ’17.  6.

❍ 소스산업화센터 기본 및 실시설계 용역           : ‘17. 10. ~ ’18.  5.

❍ 소스산업화센터 홈페이지ㆍ정보구축 용역         : ‘18.  4. ~ ’18. 12.

❍ 소스산업화센터 부지 소유권 이전(LH⟹익산시)    : ‘18. 7.

❍ 소스산업화센터 건립공사 착공                   : ‘18. 8. 27. ~

향후 추진계획

❍ 소스산업화센터 홍보영상 제작 용역              : ‘19. 3. ~ ’19. 7.

❍ 소스산업화센터 국제 심포지엄 개최              : ‘19. 6. 26.

❍ 소스산업화센터 건립공사 준공 및 연구장비 구축  : ‘19. 8.

기대효과(사업효과)

❍ 기업 수요기반 맞춤형 지원을 통한 소스산업 발전기여

❍ 농산업 분야 상호연계로 원료개발에서 상품화까지 One-stop 지원

관련사진 첨부 (조감도)

소스산업화센터 투시도 및 조감도

(담당부서 : 국가식품클러스터담당관   담당 : 박갑수  담당자 : 윤훈식  ☎859-3966)

2		마동주민센터 신축공사

❖ 비좁고 노후화된 주민자치센터를 신축하여 지역주민들의 삶에 질 향상을 위하여 지역특성을 살린 독창적이고 여성친화적인 도시환경 등을 고려한 공공청사 건립

사업개요

❍ 사업기간 : 2016.6.10.~2018.3.26.

❍ 위    치 : 익산시 마동 237-14

❍ 사업규모 : 연면적 1,968㎡, 지상 4층

❍ 총사업비 : 5,690백만원

❍ 사업내용 : 주민센터 신축

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	5,690	5,690
국 비	768	768
도 비
시 비	4,922	4,922
기 타

’18년까지 추진실적

❍ 실시설계완료 : 2015. 8.  5.

❍ 공 사  착 공 : 2016. 6. 10.

❍ 공 사  준 공 : 2018. 3. 26.

기대효과(사업효과)

❍ 주민들에게 최상의 행정서비스 제공

❍ 문화 복지시설을 갖추어 주민행복지수 향상에 기여

❍ 신청사건립으로 주민센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

관련사진 첨부 (완료전경, 위치도)

❍ 위치도

마동

주민센터

마동인구:10,034명

❍ 완료전경

(담당부서 : 회계과       담당 : 소범섭         담당자 : 전진수 ☎ 859-5672)

3		동산동주민센터 신축공사

❖ 비좁고 노후화된 주민자치센터를 신축하여 지역주민들의 삶에 질 향상을 위하여 지역특성을 살린 독창적이고 여성친화적인 도시환경 등을 고려한 공공청사 건립

사업개요

❍ 사업기간 : 2016.6.10.~2018.2.16.

❍ 위    치 : 익산시 동산동 1000-1

❍ 사업규모 : 연면적 2,359㎡, 지상 5층

❍ 총사업비 : 6,154백만원

❍ 사업내용 : 주민센터 신축

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	6,154	6,154
국 비
도 비
시 비	6,154	6,154
기 타

’18년까지 추진실적

❍ 실시설계완료 : 2015. 8.  5.

❍ 공 사  착 공 : 2016. 6. 10.

❍ 공 사  준 공 : 2018. 2. 16.

기대효과(사업효과)

❍ 주민들에게 최상의 행정서비스 제공

❍ 문화 복지시설을 갖추어 주민행복지수 향상에 기여

❍ 신청사건립으로 주민센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

관련사진 첨부 (완료전경, 위치도)

❍ 위치도

동산동인구:23,194명

동산동

주민센터

생태습지

공원

❍ 완료전경

(담당부서 : 회계과       담당 : 소범섭         담당자 : 전진수 ☎ 859-5672)

4		왕궁보석테마 대표관광지 육성사업

❖ 왕궁보석테마 대표관광지의 인지도를 향상하기 위한 기반을 정비하고,

보석을 테마로 독특하고 매력적인 관광요소를 개발 관광 홍보 및 마케팅

부문 강화 등 관광환경개선 관광산업으로 발전하기 위한 연계방안 마련

사업개요

❍ 사업기간 : 2015~2019년

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 호반로8(보석박물관) 일원

❍ 사업규모 : 160,460㎡(48,539평)

❍ 총사업비 : 7,150백만원

❍ 사업내용 (기반시설)기본계획수립, 보석광장, 칠선녀광장, 보석숲

습지 생태공원, 공룡테마공원, 이벤트광장

(진흥사업)블링블링주얼리페스티벌, 주얼리차이나데이

주얼리팸투어

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	7,150	3,650	2,300	1,200	-
국 비	1,000	500	500	-	-
도 비	4,550	2,750	1,000	800	-
시 비	1,600	400	800	400	-

’18년까지 추진실적

❍ 대표관광지 육성사업 기본계획승인(전라북도)	: 2015. 8. 27.

❍ 지방재정 투융자심사(전라북도)	: 2015. 10. 26.

❍ 보석광장,칠선녀광장,보석숲,공룡테마공원 완료       : 2017. 01

향후 추진계획

❍ 왕궁보석 대표관광지(주차장,연결교량)공사추진     : 2019. 10.

❍ 왕궁보석 대표관광지(공룡테마)실시설계추진       : 2019. 10

❍ 왕궁보석 대표관광지(공룡테마)공사 추진          : 2020. 03

기대효과(사업효과)

❍  대표관광지 활성화로 관광객 증가 및 취업 유발

❍ 지역 및 대표관광지 인지도 강화

❍  체험관광 여건강화(축체프로그램,체험관광)

관련사진 첨부 (조감도)

(담당부서 : 문화관광산업과   담당 : 김학성  담당자 : 정 웅  ☎859-5276)

5		전국체전 시설건립

❖ 체계적인 전국체전 준비로 성공적인 체전 개최

❖ 효율적인 경기장 리모델링으로 경제체전 이룩

사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 9.

❍ 위    치 : 전북 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장) 포함 익산시 일원

❍ 사업규모 : 익산종합운동장 포함 14개 종목별 경기장 개보수 1식

❍ 총사업비 : 37,099백만원

❍ 사업내용

- 익산종합운동장(주경기장, 보조경기장, 실내체육관) 경기장 리모델링

- 익산종합운동장 주 진입로 정비

- 배산실내체육관 포함 13개 종목별 경기장 시설 개보수

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	37,099	14,259	22,840	0	0
국 비	11,311	4,329	6,982	0	0
도 비	9,522	4,342	5,180	0	0
시 비	16,266	5,588	10,678	0	0
기 타	0	0	0	0	0

’18년까지 추진실적

❍ 익산종합운동장 개선공사(준공)

종 목	경기장명	사업내용	비 고
육 상	주경기장	∘본부석 전면 리모델링 ∘육상트랙 우레탄 교체 ∘관람석 의자 전면교체 ∘VIP대기실 및 리셉션장 증축 등	제1종 공인완료
	보조경기장	∘육상트랙 우레탄 전면교체
	진 입 로	∘주경기장 진입부 및 주변환경 개선 ∘산책로, 경관조명, 쉼터 조성 등
펜 싱	실내체육관	∘관람석 의자 및 냉난방기 교체

❍ 전국체전 종목별 경기장 리모델링(준공)

종 목	경기장명	사업내용	비 고
축 구	배산축구장	인조잔디 교체
	금마축구장	인조잔디 교체
마라톤	익산시 일원	아스콘 덧씌우기
경 보	익산시 일원	아스콘 덧씌우기
야 구	익산야구장	관련 시설정비
소프트볼	리틀야구장	마운드 정비
보디빌딩	솜리문화예술회관	조명 교체
배 구	남성고체육관	조명 교체
	기계공고	조명 교체
에어로빅	배산실내체육관	조명 교체
철인3종	웅포면일원	접안시설 설치
론 볼	익산론볼장	인조잔디 교체
배드민턴	원광대문화체육관	조명 교체
검 도	익산고체육관	바닥정비

향후 추진계획

❍ 2019 전국소년(장애학생)체전 개최 대비 경기장 시설 점검 : 2019. 2. ~ 4.

❍ 2020 전국생활체육대축전 대비 경기장 시설 및 안전점검 : 2019. 7. ~ 2020. 3.

기대효과(사업효과)

❍ 완벽한 체전 시설 리모델링으로 전국(장애인)체전 성공개최 및 체육인프라 구축

❍ 시민들에 체육활동 참여 기회 제공

관련사진 (완료전경)

❍ 완료전경

익산종합운동장	익산실내체육관
금마축구공원	익산론볼링장

(담당부서 :  체육진흥과     담당 : 이춘희       담당자 : 조기현  ☎ 859 - 7652 )

8		공공체육시설 장애인편의시설 설치사업

❖ 공공체육시설 내 장애인편의시설 설치로 장애인의 이동권과 접근권 보장 및 2018 제38회 전국장애인체전 개최 준비

사업개요

❍ 사업기간 : 2016. 6. ~ 2018. 9.

❍ 위    치 : 전북 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장) 포함 익산시 일원

❍ 사업규모 : 익산종합운동장(주경기장, 보조경기장, 실내체육관) 장애인편의시설 1식

❍ 총사업비 : 2,137백만원

❍ 사업내용 : 익산종합운동장(주경기장, 보조경기장, 실내체육관) 경기장 내                  장애인 엘리베이터 등 장애인 편의시설 설치

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	2,137	1,747	390	0	0
국 비	1,500	1,227	273	0	0
도 비	0	0	0	0	0
시 비	637	520	117	0	0
기 타	0	0	0	0	0

’18년까지 추진실적

❍ 익산종합운동장 내 장애인편의시설 설치

종 목	경기장명	사업내용	비 고
육 상	주경기장	∘장애인 경사로(램프) 출입구 설치 ∘경기장 내 장애인 이동경사로 설치 ∘장애인엘리베이터 설치 ∘장애인 관람석 설치 등 ∘경기장 외부 장애인전용 주차장 설치
	보조경기장	∘출입구 장애인 경사로 설치
탁 구	실내체육관	∘체육관 내 장애인 이동경사로 설치 ∘장애인엘리베이터 설치 등 ∘체육관 외부 장애인전용 주차장 설치

향후 추진계획

❍ 2019 전국장애학생체전 개최 대비 장애인편의시설 점검 : 2019. 2. ~ 4.

❍ 2020 전국생활체육대축전 대비 편의시설 안전점검     : 2019. 7. ~ 2020. 3.

기대효과(사업효과)

❍ 공공체육시설 내 장애인편의시설 설치로 장애인의 이동권과 접근권 보장

❍ 장애체육인들의 시설 이용에 대한 만족도 향상 및 체육활성화에 기여

관련사진 첨부

(담당부서 :  체육진흥과     담당 : 이춘희   담당자 : 조기현 ☎ 859 - 7652 )

7		국내복귀 촉진을 위한 임대형공장 조성

❖ 지역특성화산업(귀금속보석) 육성을 위한 임대공간 조성 등 지속적 지역산업 발전기반 마련을 통한 주얼리 기업 생태계 구축

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

❍ 위    치 : 낭산면 구평리 1538, 1538-1

❍ 사업규모 : 신축, 2동, 1층, 철골조, 연면적 합계 2,392㎡

❍ 총사업비 : 3,794백만원

❍ 사업내용 : 주얼리 임대공장 건립

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	3,794	0	3,794	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 비	3,794	0	3,794	0	0

’18년까지 추진실적

❍ 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 승인         : 2017. 11. ~ 12.

❍ 설계용역 착수 및 납품                            : 2018.  2. ~  5.

❍ 계약심사, 공용건축물 협의, 공사 발주              : 2018. 6.

❍ 공사계약 및 착공                                 : 2018. 7.

❍ 공사 준공 및 준공검사, 임대공장 입주              : 2018. 10.

기대효과(사업효과)

❍  임대공간 조성을 통한 주얼리 기업 유치 및 일자리 창출

관련사진 (조감도, 위치도)

(담당부서 :  한류패션과  계장 : 엄은용  담당자 : 김관옥 ☎ 859 - 4382 )

8		천년초권역단위종합개발

❖ 농촌지역 주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고, 농촌의 계획적인 개발을 통하여 농촌의 인구유지 및 지역별 특화발전 도모

사업개요

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 익산시 성당면 갈산리 일원

❍ 총사업비 : 4,124백만원(국비 2,887, 도비 288, 시비 949)

❍ 사업내용 : 천년초체험관, 마을회관, 쉼터조성, 경관정비, 컨설팅 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	4,124	4,124
국 비	2,887	2,887
도 비	288	288
시 비	949	949
기 타

’18년까지 추진실적

❍ 신규사업 선정(농림축산식품부)	: 2013. 10

❍ 기본계획 수립	: 2015.  1

❍ 천년초체험관 운영법인 설립(천년초원 농업회사법인)	: 2018.  4

❍ 시행계획 수립	: 2018.  8

향후 추진계획

❍ 세부공사 준공 및 사업 완료	: 2019. 12

기대효과(사업효과)

❍ 천년초 체험, 상품 연계를 통한 방문객 유입 및 지역소득 창출

❍ 주민 참여형 지역개발사업으로 농촌의 자생력 및 경쟁력 강화

관련사진 (위치도)

(담당부서 : 농촌활력과       담당 : 도일       담당자 : 김동주 ☎ 859-7223)

9		새만금바이오순환림 조성사업(휴․폐업축사 매입)

❖ “왕궁정착농원 환경개선 종합대책('10.7.)”에 따라 정착농원 내 가축분뇨 오염원의 근원적 제거로 정착농원 환경개선 및 새만금상류 수질 개선

사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원 3개 정착촌 내

❍ 사업규모 : 221,008㎡

❍ 총사업비 : 21,305백만원(도비 4,100, 시비 17,205)

❍ 사업내용 : 휴․폐업축사 협의 매입

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	21,305	18,750	2,555
국 비
도 비	4,100	3,200	900
시 비	17,205	15,550	1,655
기 타

’18년까지 추진실적

❍ “왕궁정착농원 환경개선 종합대책” 발표	: 2010.  7.

❍ 특별관리지역 지정 고시('11년~15년, 폐업 218천㎡ 매입)	: 2011.  1.  1.

❍ 특별관리지역 지정 연장 고시('16년~'17년까지)	: 2016.  1. 25.

❍ 특별관리지역 지정 연장 재고시('18년까지)	: 2018.  1. 24.

❍ 연도별 매입 실적

계	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018
221,008	79,507	38,701	19,115	30,438	9,906	22,561	20,780

향후 추진계획

❍  매입 휴․폐업축사 철거	: 2019. 1. ~

❍  바이오순환림 조성	: 2019. 10. ~

기대효과(사업효과)

❍ 축산오염원의 근원적 제거로 새만금상류 수질 개선으로 국책사업의 성공적 추진

❍ 왕궁정착농원의 열악한 정주여건 개선으로 한센인의 삶의 질 향상

관련사진

(담당부서 : 녹색환경과     계장 : 오현호    담당자 : 진성재   ☎063-859-4531)

10		동부 건강생활지원센터 신축

○ 금마보건지소「객사·관아터 발굴복원」을 위한 문화재 발굴조사 추진에 따라 보건지소 이전 신축 필요

○ 의약분업 지역으로 보건지소 이용자 감소와 정부의 소생활권 건강증진사업 확대에 따른 기능전환 방침에 따라 건강생활지원센터로 전환

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.

❍ 위    치 : 익산시 금마면 서고도리 654

❍ 사업규모 : 연면적 804.15㎡(지상 2층), 부지면적 1,699.1㎡

❍ 총사업비 : 2,794백만원

❍ 사업내용 : 한옥형 건축물(건강증진실, 프로그램실, 사무실 등)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 편성액	2020년이후
계 (집행액)	2,794		2,794
국 비	1,028		1,028
도 비	257		257
시 비	1,509		1,509
기 타

그간 추진실적

❍  보건지소 진료기능 폐쇄 기능전환 방침 결정 : 2017.  7.

❍  2018년 농어촌의료서비스개선사업 신청 : 2017. 7. 13.

❍  지방재정투자 심사 : 2017.  10. 27

❍ 기본 및 실시설계 : 2017. 12. 28. ~ 2018. 9. 20.

❍ 공사착공 : 2018.11.1.

❍ 외부 골조, 벽체, 지붕(골조) 공사 : 2018.11. ~2019. 1.

향후 추진계획

❍ 한옥 기와지붕 올리기 작업 : 2019. 5.

❍ 외부 도장, 토목공사 및 실내 마감공사 : 2019. 3. ~ 2019. 7.

❍ 공정률(2019.7.31. 기준) 93%

❍ 공사완공 예정 : 2019. 8월중

❍ 개소 및 운영 예정 : 2019. 10월중

▸관할지역 : 금마면, 왕궁면, 팔봉동 ▸인구 수 : 16,712명(2019년 5월말기준)

기대효과(사업효과)

❍ 지역주민에 맞는 건강생활실천사업 추진으로 건강수명 연장 및 삶의 질 향상에 기여하고 시민들에게 쾌적하고 안락한 건강쉼터 제공

관련사진 첨부 (조감도)

(담당부서 : 보건지원과   담당 : 보건행정계장   담당자 : 김 도  ☎ 859-4807 )