(2019회계연도) 재정공시 대상사업 목록

【 특 수 공 시 】

[기준년도 : 2019년도]                                                     (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사 업 개 요		사업부서	비 고 (페이지)
1	전통시장 시설현대화 주차환경개선사업	- 사업기간 :	2019.8.~2020.8.	일자리정책과	P. 69
		- 총사업비 :	2,100백만원
		- 사업규모 :	주차면수 29면 증설
		- 사업내용 :	주차장 확장공사(A=1,137.5㎡ 확장)
2	익산국가산업단지 재생산업	- 사업기간 :	2017~2026	투자유치과	P. 72
		- 총사업비 :	21,000백만원
		- 사업규모 :	A=1,335,893㎡
		- 사업내용 :	기반시설정비 및 확충
3	황등농공단지 공공폐수 처리시설 개량사업	- 사업기간 :	2019~2021	투자유치과	P. 74
		- 총사업비 :	4,600백만원
		- 사업규모 :	시설용량 6,000㎥/일
		- 사업내용 :	처리용량 변경(6,000→600㎥/일) 및 처리공정에 맞는 시설전면보수
4	미륵사지관광지 조성사업	- 사업기간 :	2006 ~ 2021	문화관광 산업과	P. 76
		- 총사업비 :	34,998백만원
		- 사업규모 :	108,743㎡
		- 사업내용 :	광장, 주차장, 편의시설 조성 등
5	왕궁보석테마 대표관광지육성사업	- 사업기간 :	2015 ~ 2024	문화관광 산업과	P. 78
		- 총사업비 :	17,150백만원
		- 사업규모 :	160,460㎡
		- 사업내용 :	관광기반 및 관광진흥조성
6	문화재 보수 정비	- 사업기간 :	2019~2021	역사문화재과	P.80
		- 총사업비 :	13,073백만원
		- 사업규모 :	4,206.33㎡
		- 사업내용 :	백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성
7	익산시 펜싱아카데미 건립	- 사업기간 :	2019 ~ 2021	체육진흥과	P. 82
		- 총사업비 :	5,000(국1,500 도2,000 시1,500)
		- 사업규모 :	연면적 2,000㎡, 지상 1개층
		- 사업내용 :	펜싱 피스트 15개, 샤워장, 사무실 등
8	반다비(장애인)체육센터 건립	- 사업기간 :	2019 ~ 2021	체육진흥과	P. 82
		- 총사업비 :	7,500(기금4,000 시3,500)
		- 사업규모 :	연면적 3,200㎡, 지하1층, 지상 2층
		- 사업내용 :	수중운동실, 다목적체육관, 헬스장 등

연번	사 업 명	사 업 개 요		사업부서	비 고 (페이지)
9	서부권 로컬푸드직매장 신축	- 사업기간 :	2019. 9.~ 2021. 9.	농산유통과	P. 84
		- 총사업비 :	3,000백만원(국600,도270,시2,130)
		- 사업규모 :	연면적 약 998㎡ / 3층
		- 사업내용 :	로컬푸드직매장,카페, 사무실등
10	새만금바이오 순환림조성사업	- 사업기간 :	2010. ~ 2020.	환경정책과	P. 87
		- 총사업비 :	16,750백만원
		- 사업규모 :	336,238㎡
		- 사업내용 :	매입 휴․폐업축사 철거, 바이오순환림 조성
11	우수저류시설 설치	- 사업기간 :	2018. 01~2022. 12	시민안전과	P. 89
		- 총사업비 :	23,000백만원
		- 사업규모 :	저류시설 V= 18,850㎥
		- 사업내용 :	우수저류시설 설치 V=18,850㎥ 주차장 조성 A=2,2750㎥ 어린이공원 조성 A=2,927㎥
12	마한로 미개설구간 도로개설	- 사업기간 :	2011 ~ 2021년	도시개발과	P. 91
		- 총사업비 :	8,520백만원
		- 사업규모 :	L=520m, B=25m
		- 사업내용 :	도시계획도로개설
13	익산대로 10길(대로3류26호) 도로확포장	- 사업기간 :	2019 ～ 2022년	도시개발과	P. 93
		- 총사업비 :	9,800백만원
		- 사업규모 :	L=215m, B=6m→25m
		- 사업내용 :	도시계획도로개설
14	동산동 월담지구 새뜰마을 사업	- 사업기간 :	2016~2020(5개년)	도시재생과	P. 95
		- 총사업비 :	3,850백만원
		- 사업규모 :	동산동 356번지 일원 / 43,300㎡
		- 사업내용 :	생활인프라 확충 및 주거환경 개선
15	도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	- 사업기간 :	2018~2022(5개년)	도시재생과	P. 98
		- 총사업비 :	25,000백만원
		- 사업규모 :	중앙동, 남중동 일원 / 185,007㎡
		- 사업내용 :	원도심 활성화
16	모현동 옥창지구 새뜰마을 사업	- 사업기간 :	2019~2022(4개년)	도시재생과	P. 101
		- 총사업비 :
			4,200백만원
		- 사업규모 :
			모현동 옥창마을 일원 / 29,925㎡
		- 사업내용 :
			생활인프라 확충 및 주거환경 개선
17	신청사건립추진	- 사업기간 :	2017. 12. ~ 2023. 6.	도시전략사업과	P. 103
		- 총사업비 :	85,000백만원
		- 사업규모 :	연면적 39,271㎡
		- 사업내용 :	본청･의회(법정규모22,336㎡), 지하주차장(14,215㎡)기타(2,720㎡)

1		전통시장 시설현대화 주차환경개선사업	(일자리정책과)

❖ 열악한 전통시장의 주차환경을 개선하여 불법 주정차문제를 해결하고,

전통시장을 활성화하기 위함

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 8. ~ 2020. 8.

◦ 위    치 : 익산시 창인동1가 131-18번지 매일시장 주차장 일원

◦ 사업규모 : 주차면수 29면 증설

◦ 총사업비 : 2,100백만원(국비 1,260 시비 840)

◦ 사업내용 : 주차장 확장공사(A=1,137.5㎡ 확장)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	2,100				2,100
국 비	1,260				1,260
도 비
시 비	840				840
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 중소벤처기업부 전통시장 활성화 지원사업 공모 신청	: 2019.  2. 21.

◦ 공모사업 대상지 현장 실사(전북지방중기청, 전북도)	: 2019.  4.  3.

◦ 중소벤처기업부 전통시장 활성화 지원사업 공모 선정	: 2019.  5. 13.

◦ 토지 감정평가 및 협의매수	: 2019. 10.~12.

□ 향후 추진계획

◦ 기존 건축물 철거 및 건설 폐기물 처리	: 2020.  7.

◦ 사업부지 경계복원측량	: 2020.  7.

◦ 토목공사 및 전기공사	: 2020.  8.

◦ 준공 및 위탁관리 협약체결	: 2020.  8.

□ 기 대 효 과 (사업효과)

◦ 주차면수 증설에 따라 주차장 이용객의 편의성 증대

◦ 주차편리 증대에 따른 전통시장 이용객 증가와 전통시장 활성화 도모

□ 위치도 및 지번도

□ 계획평면도

(담당부서 : 일자리정책과   담당 : 김경식     담당자 : 석지현  ☎ 859 - 5233)

2		익산국가산업단지 재생사업	(투자유치과)

❖ 노후되고 부족한 산업단지 기반시설을 정비 및 확충하여 노후산업단지를 도심 내 낙후지역에서 성장 거점으로 전환

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2026년(기반시설정비 2017~2021)

◦ 위    치 : 익산국가산업단지(익산시 영등동, 어양동, 신흥동 일원)

◦ 사업규모 : 1,335,893㎡

◦ 총사업비 : 21,000백만원

◦ 사업내용 : 기반시설 정비 및 지원시설 확충, 토지이용구조 개선

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	21,000			1,000	20,000
국 비	10,500			500	10,000
도 비
시 비	10,500			500	10,000
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 익산국가산단 경쟁력강화사업지구선정(산업부, 국토부)	: 2015.  7.

◦ 익산 국가산단 재생계획 수립 용역 착수	: 2017.  9.

◦ 중앙도시계획위원회(국토교통부) 승인	: 2019.  8.

◦ 재생사업지구 지정 및 지형도면 고시	: 2019. 10.

◦ 익산 국가산단 재생시행계획 수립 용역 착수	: 2020.  1.

□ 향후 추진계획

◦ 재생시행계획 수립 및 관련기관 협의	: 2020.  8.

▸산업통상자원부, 문화재청, 전라북도청, 경찰서 등

◦ 재생시행계획 용역 중간 보고회(주민설명회포함)	: 2020.  8.

◦ 설계경제성검토 및 기술자문위원회 심의	: 2020. 10.

◦ 재생시행계획 타당성 검증 및 승인 신청	: 2020. 11.

◦ 국토부 승인 및 최종 보고회	: 2020. 12.

◦ 공사 발주	: 2020. 12.

◦ 공사 준공	: 2021. 12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 기반시설 및 편의시설의 확충을 통한 조업 및 근로여건 개선

◦ 전략산업 및 업종재배치를 통한 단지 혁신

◦ 기존 공장시설의 현대화 유도, 업종관리를 통한 단지 환경 개선

□ 관련사진 첨부

(담당부서 : 투자유치과  담당 : 산단관리계장 최홍기  담당자 : 유정옥 ☎ 859-5766)

3		황등농공단지 공공폐수처리시설 개량사업	(투자유치과)

❖ 처리시설용량 대비 유입폐수량이 현저히 적어 실제 유입량에 맞는 시설용량으로 축소 조정하여 효율적인 운영을 하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021

◦ 위    치 : 황등면 율촌리 876 (황등농공단지)

◦ 사업규모 : 시설용량 6,000㎥/일

◦ 총사업비 : 4,600백만원 (국비50%, 시비50%)

◦ 사업내용 : 시설용량 축소(6,000→600㎥/일) 및 시설전면보수

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	4,600				4,600
국 비	2,300				2,300
도 비
시 비	2,300				2,300
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦  국고보조사업 신청(환경부)	: 2018. 03.

◦  기술진단 실시	: 2018. 10.

◦ 지방재정 투자심사	: 2018. 10.

◦ 기본계획 및 실시설계 용역 착수	: 2019. 09.

□ 향후 추진계획

◦ 기본계획 변경(안) 협의 (한국환경공단)	:  2020. 07.

◦ 기본계획 및 실시설계 국비지원대상 협의(환경부)	:  2020. 07. ~ 08.

◦ 용역 중간보고회	:  2020. 08.

◦ 용역 준공	:  2020. 09.

◦ 공사 발주	:  2020. 10.

◦ 공사 준공	:  2021. 12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 유입량에 맞는 처리용량 개선으로 운영 효율 증대

◦ 시설용량 축소로 시설 운영비에 대한 입주기업 부담 완화

◦ 노후시설 전면 보수로 안정적인 운영

□ 현황 사진

(담당부서 : 투자유치과   담당 : 산단관리계장 최홍기 담당자 : 최수민  ☎ 859-5742)

4		미륵사지 관광지 조성사업	(문화관광산업과)

❖ 익산의 백제문화자원을 활용한 관광지 개발사업 추진 및 관광시설 확충으로 관광활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2021

◦ 위    치 : 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

◦ 사업규모 : 108,743㎡

◦ 총사업비 : 34,998백만원(국비5,127, 시비27,871, 민자 2,000)

◦ 사업내용 : 광장, 주차장, 자연지형공원, 편의시설 및 상가조성 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계	34,998	21,300	2,600	9,098	2,000
국 비	5,127	1,500	1,300	2,327
도 비
시 비	27,871	19,800	1,300	6,771
기 타	2,000				2,000

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 국토이용계획변경 및 개발계획 결정 고시	: 2004. 01.

◦ 관광지 지정 및 고시(149,880㎡)	: 2006. 02.

◦ 문화재현상변경 조건부 허가(문화재청)	: 2007. 01.

◦ 관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인(108,743㎡)	: 2007. 11.

◦ 서부내륙권 광역관광개발 계획(문체부) 포함	: 2015. 05.

◦ 문화재 표본조사(상가지역) 완료	: 2016. 11.

◦ 문화재현상변경 조건부허가(문화재청)	: 2017. 02.

◦ 편입토지 및 지장물 매입(99%)	: 2007. 08. ~ 현재

◦ 미륵사지 관광지 조성계획 변경 승인(전북도)	: 2018. 06.

◦ 미륵사지 관광지 투융자 조건승인(행안부)	: 2018. 07.

◦ 미륵사지 관광지 조성사업 1차분 착공	: 2018. 12.

◦ 미륵사지 관광지 문화재 발굴용역 완료	: 2019. 12.

□ 향후 추진계획

◦ 미륵사지 관광지 조성사업 전체분 준공	: 2020.  12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 익산의 백제문화자원을 활용한 관광지 개발사업 추진 및 관광기반시설 확충으로 백제역화문화 중심지로서의 확고한 이미지 확보와 동시에 관광활성화 도모

□ 관 련 사 진

(담당부서 : 문화관광산업과   관광개발계장 : 김학성   담당자 : 정 웅 ☎ 859 – 5276)

5		왕궁보석테마 대표관광지 육성사업	(문화관광산업과)

❖ 전라북도 대표관광지 활성화계획의 일환으로 왕궁보석테마 관광지의 인지도를 향상하기 위한 기반조성 및 관광홍보, 마케팅부분 강화 등 관광환경 개선을 통한 경쟁력 있고 특화된 대표 관광지 육성 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2024

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

◦ 사업규모 : 160,460㎡

◦ 총사업비 : 17,150백만원(국비 1,000  도비 9,550  시비 6,600)

◦ 사업내용 : (기반시설) 기본계획수립, 보석광장, 칠선녀광장, 보석숲 습지 생태공원, 공룡테마공원, 이벤트광장 체험시설 조성

(진흥사업) 블링블링주얼리페스티벌, 주얼리차이나데이, 주얼리팸투어, 행사 및 축제 지원 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계	17,150	5,950	1,200	2,000	8,000
국 비	1,000	1,000
도 비	9,550	3,750	800	1,000	4,000
시 비	6,600	1,200	400	1,000	4,000
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 대표관광지 육성사업 기본계획승인(전라북도)	: 2015.  8. 27.

◦ 지방재정 투융자심사(전라북도)	: 2015. 10. 26.

◦ 보석광장 정비공사(15년사업) 완료	: 2016. 08.

◦ 칠선녀광장 정비공사(16년사업) 완료	: 2017. 03.

◦ 보석숲 및 공룡테마공원 정비공사(17년사업) 완료	: 2018. 05.

◦ 생태습지공원(주차장,연결교량)(18년사업)용역완료	: 2018. 10.

◦ 공룡테마공원 정비사업(19년사업) 실시설계용역 착수	: 2019. 03.

◦ 보석어드벤처사업(20년사업) 실시설계용역 착수	: 2019. 07.

◦ 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획 승인	: 2019. 08.

◦ 생태습지공원(주차장, 연결교량) 정비사업(18년사업)완료	: 2019. 12.

□ 향후 추진계획

◦ 제2차 대표관광지 조성사업 기본계획변경	: 2020. 06.

◦ 보석어드벤처사업(20년사업) 착공	: 2020. 08.

◦ 공룡테마놀이터 설치사업(19년사업) 준공	: 2020. 10.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 대표관광지 육성사업을 통해 시설 노후화로 침체된 왕궁보석테마 관광지에 차별화된 관광시설 도입을 통해 익산시의 관광활성화 도모

□ 관 련 사 진

(담당부서 : 문화관광산업과   관광개발계장 : 김학성   담당자 : 정 웅 ☎ 859 –5276)

6		문화재 보수정비(백제왕궁ICT 역사관 조성)	(역사문화재과)

❖ 국내 유일의 “홀로그램 콘텐츠 서비스 지원센터‘ 구축을 추진중에 있어 세계유산인 문화유산을 3차원으로 복원하여 관람객에게 능동 체험형 콘텐츠 제공 및 문화유산과 연계한 관광기반 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021(3년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 562번지 일원

◦ 사업규모 : 4,206.33㎡/1,275평(기존 : 2,349.78㎡/712평, 증축 1,856.55㎡/563평)

◦ 총사업비 : 13,073백만원(국 3,921 도 4,576 시 4,576)

◦ 사업내용 : 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계	13,073		700	5,637	7,006
국 비	3,921		210	1,610	2,101
도 비	4,576		245	1,878	2,453
시 비	4,576		245	1,879	2,452
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦  백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 설계용역 추진

◦  2020년 세계유산 보존관리사업 예산 5,667백만원 확정

□ 향후 추진계획

◦ 백제왕궁 ICT 역사관 조성 건축공사 추진	: 2020. 7. ~ 2021.  9.

◦ 백제왕궁 ICT 역사관 조성 전시공사 추진	: 2021. 8. ~ 2021. 12.

◦ 백제왕궁 ICT 역사관 개관	: 2022.  1.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦  ’홀로그램 콘텐츠 서비스 지원센터‘ 구축을 통해 세계문화유산을 3차원으로 복원하여 관람객들에게 능동 체험형 콘텐츠 제공

◦ 역사관 조성을 통해 문화유산 보존정비·관람환경 개선 및 문화관광자원 구축 활용

□ 관 련 사 진

(담당부서 : 역사문화재과    담당 : 송대성   담당자 : 송대성  ☎ 859-5792)

7, 8		반다비(장애인)체육센터·펜싱아카데미 복합건립	(체육진흥과)

❖ 장애인의 생활체육 환경 및 프로그램 지원으로 체육활동 참여, 홍보, 상담 등 어울림 체육활동 지원

❖ 시민들의 신체적 건강, 여가활동 증진 및 펜싱 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2021.

◦ 위    치 : 익산시 부송동 산74-2번지 일원(익산종합운동장 내)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(국 5,500, 도 2,000, 시 5,000)

▸반다비체육센터 : 7,500백만원(기금 4,000, 시 3,500)

▸펜싱아카데미 : 5,000백만원(국 1,500, 도 2,000, 시 1,500)

◦ 사업내용 : 대지면적 260,000㎡, 연면적 5,250㎡(지하1층, 지상3층)

▸지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸지상1층 : 수중운동실, 다목적체육관, 샤워장, 카페라운지 등

▸지상2층 : 헬스장, 소체육관, 프로그램1·2실, 사무실 등

▸지상3층 : 펜싱아카데미(피스트 15개, 샤워장, 사무실 등)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	12,500				12,500
국 비	5,500				5,500
도 비	2,000				2,000
시 비	5,000				5,000
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 지방재정투자심사 이행	: ’19. 07.

◦ 공유재산관리계획심의 및 의회 의결	: ’19. 07.

◦ 공공건축사업계획 사전검토	: ’19. 09.

◦ 설계공모 심사위원 선정	: ’19. 11.

◦ 설계공모 및 당선작 선정	: ’19. 12. ~ ’20. 03.

◦ 설계용역 및 운동장조성계획(변경)용역	: ’20. 04.~09.

□ 향후 추진계획

◦ 실시계획인가(건축협의 등), 공사업체 및 감리원 선정	: ’20. 09.~10.

◦ 공사 착공 및 준공	: ’20. 11.~’21. 12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 신체적 건강, 여가활동 증진을 통해 시민들의 삶의 질 향상

◦ 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화

□ 조 감 도

(담당부서 : 체육진흥과     담당 : 시설조성계장 송기용    담당자 : 정용복 ☎ 859-5872)

9		서부권 로컬푸드직매장 신축	(농산유통과)

❖ 로컬푸드 직거래 판매장 확대로 관내 소농·부녀농·가족농·귀농인들의 소득 향상을 통한 농촌 복지 증진

❖ 그간 소외되어온 서부권 주민들에게 지역에서 생산되는 안전하고 신선한 농산물 공급으로 시민 건강 증진 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2021. 9.

◦ 위    치 : 익산시 모현동2가 671

◦ 사업규모 : 연면적 약998㎡ / 3층

◦ 총사업비 : 3,000백만원(국비600, 도비270, 시비 2,130)

◦ 사업내용 : 로컬푸드직매장, 카페, 안전성검사실, 소포장실, 사무실 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	3,000				3,000
국 비	600				600
도 비	270				270
시 비	2,130				2,130
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 공모사업 대상자 선정(국비 6억 확보)	: 2019. 02. 28.

◦ 지방재정 투자심사 완료	: 2019. 05. 01.

◦ 공유재산관리 변경계획 승인(의회)	: 2019. 06. 14.

◦ 도시계획관리계획 결정(변경) 완료	: 2019. 06. 21.

◦ 공유재산 인수(회계과 ⇒ 농식품유통과)	: 2019. 07. 08.

◦ 서부권로컬푸드 참여 희망농가 및 소비자 조직화 교육 실시	: 2019. 08.~10.

▸총14회 / 207명 참석(일반농가, 귀농귀촌인, 임산물 생산농가, 농산물 가공농가 등)

◦ 서부권로컬푸드 참여 희망농가 및 소비자 선진지 견학 실시	: 2019. 11.

◦ 직매장 신축 공사 기본 및 실시설계 용역 조달 의뢰	: 2019. 12. 17.

◦ 설계용역 계약 및 착수	: 2020. 02. 14.

□ 향후 추진계획

◦ 서부권 로컬푸드직매장 신축 설계용역 완료	: 2020. 07.

◦ 서부권 로컬푸드직매장 농가 조직화	: 2020. 09.~12.

◦ 신축 공사 업체 계약 및 시공	: 2020. 09.~12.

◦ 직매장 준공완료 및 개장	: 2021. 09.

▸내부인테리어 등 공사 완료

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 도시민에 건강한 지역 먹거리를 제공함으로써 시민 건강을 증진하고 지역  소농들의 소득 향상 기여

◦ 생산자와 소비자가 상호 교류하고 소통하는 공간으로 활용하고 신규 참여농가 확보를 통한 농촌 경제 활성화 및 일자리 창출

□ 관 련 사 진

(담당부서 : 농산유통과   담당 : 로컬푸드계장 최병중   담당자 : 김현경  ☎ 859—3787)

10		새만금 바이오순환림 조성사업	(환경정책과)

❖ 왕궁정착농원 매입 휴․폐업축사의 철거 및 바이오순환림 조성으로 훼손된 생태계 복원하여 새만금 상류 수질개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2010년 ~ 2020년

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원(3개 한센인 정착촌 내)

◦ 사업규모 : 336,238㎡

◦ 총사업비 : 16,750백만원(국비 13,500, 시비 3,250)

◦ 사업내용 : 매입 휴․폐업축사 철거, 바이오순환림 조성

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	16,750	12,750	2,000	2,000
국 비	13,500	11,500	1,000	1,000
도 비
시 비	3,250	1,250	1,000	1,000
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 새만금 상류 바이오순환림 조성사업 지침 통보	: 2019. 11. 17.

◦ 2010년~2012년 바이오순환림 조성(259,142㎡)	: 2010. ~ 2014.

◦ 2017년~ 2018년 바이오순환림 조성 재추진(축사 추가매입)	: 2017.  01. ~

◦ 2017년 바이오순환림 조성사업 준공	: 2019. 04. 01.

□ 향후 추진계획

◦ 2018년 바이오순환림 조성사업 준공	: 2020. 5.

◦ 바이오순환림 조성사업 사업종료 및 정산	: 2020. 8. ~

◦ 바이오순환림 유지관리	: 연중

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 새만금 상류 축산오염원의 근원적 제거 및 생태계 복원으로 새만금 수질개선

◦ 왕궁정착농원의 열악한 정주여건 개선으로 한센인의 삶의 질 향상

□ 조 감 도

(담당부서 : 환경정책과     담당 : 오현호    담당자 : 진성재  ☎ 063-859-4531)

11		우수저류시설 설치(인화지구)	(시민안전과)

❖ 기상이변으로 발생하는 집중호우 피해를 예방하여 저지대 침수지역의 피해를 저감하고 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하여 재해로부터 안전한 도시 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2022. 12.

◦ 위    치 : 주현동 203번지, 동산동 1048번지 일원

◦ 사업규모 : 저류시설 V= 18,850㎥

◦ 총사업비 : 23,000백만원(국비 11,500, 도비 3,450, 시비 8,050)

◦ 사업내용 : 우수저류시설 설치 V=18,850㎥, 주차장 조성 A=2,2750㎥,

어린이공원 조성 A=2,927㎥

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계	23,000	1,000	12,000	10,000
국 비	11,500	500	6,000	5,000
도 비	3,450	150	1,800	1,500
시 비	8,050	350	4,200	3,500
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2018.  3. 20.

◦ 인화지구 우수저류시설 실시설계 심의(행정안전부)	: 2019.  7. 16.

◦ 인화2지구 마동 지구단위계획 결정(변경) 심의	: 2019. 12.  4.

□ 향후 추진계획

◦ 터파기 등 굴착	: 2020. 07.~

◦ 구조물 시설 설치	: 2020. 12.~

◦ 공사 준공	: 2022. 12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 주현동, 인화동 저지대 침수 예방

◦ 재해예방으로 소중한 시민의 생명과 재산을 보호

□ 관 련 사 진

인화1지구

인화2지구

(담당부서 :  시민안전과    담당 :  김국주    담당자 : 김영진  ☎  859-5952)

12		마한로 미개설구간 도로개설	(도시개발과)

❖ 도시가로망 구축으로 주거환경 개선 및 주민생활 편익도모

❖ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2021년

◦ 위    치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

◦ 사업규모 : L=520m, B=25m(대로3류14호)

◦ 총사업비 : 8,520백만원(공사비 3,842백만원,  보상비 4,678백만원)

◦ 사업내용 : 도시계획도로개설

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	8,520	717	6	1,374	6,423
국 비	900	400			500
도 비
시 비	7,620	317	6	1,374	5,923
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 특별교부세 교부통지	: 2010. 12. 20.

◦ 실시설계용역	: 2018.  3. ~ 2018.  7.

◦ 편입토지 및 지장물 보상(100%)	: 2012.  1. ~ 2020.  4.

◦ 시설공사 추진	: 2018. 12. ~

▸1차분 준공	: 2019. 12.

▸3차분 준공	: 2020.  6.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 관 련 사 진

1공구

2공구

부송4지구 도시개발사업(L=730m)

3공구

(담당부서 :  도시개발과    담당 : 김대영     담당자 : 정재형  ☎  859-5518 )

13		익산대로10길(대로3류26호) 도로확포장	(도시개발과)

❖ 도시가로망 구축으로 주거환경 개선 및 주민생활 편익도모

❖ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019 ～ 2022년

◦ 위    치 : 익산시 인화동 1가 1-18번지 ~ 79-10번지 일원

◦ 사업규모 : L=215m, B=6m→25m(대로3류26호)

◦ 총사업비 : 9,800백만원(공사비 2,800백만원,  보상비 7,000백만원)

◦ 사업내용 : 도시계획도로개설

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	9,800				9,800
국 비
도 비
시 비	9,800				9,800
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 실시설계용역추진	:  2019.  2. ~ 2020.  4.

◦ 투자심사	:  2019.  3.  8.

◦ 보상협의 추진(현보상률 : 37%)	:  2019.  7. ~ 현재

□ 향후 추진계획

◦ 편입토지 및 지장물 보상	: 2020.  1. ~ 12.

◦ 공사착공 및 준공	: 2021.  1. ~ 12.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 관 련 사 진

(담당부서 :  도시개발과    담당 : 김대영     담당자 : 정재형  ☎  859-5518 )

14		취약지역 개조 (동산동 월담지구 새뜰마을 사업)	(도시재생과)

❖ 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

❖ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(5개년)

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원

◦ 사업규모 : 43,300㎡

◦ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694  도비 346,  시비 810)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생 인프라, 마을공동체

지원사업, 주민역량강화사업 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2016년	2017년	2018년	2019년이후
계	3,850	557	357	972	1,964
국 비	2,694	390	250	680	1,374
도 비	346	50	32	87	177
시 비	810	117	75	205	413

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 16년 신규 새뜰마을사업 공모 선정	: 2016.  2.

◦ 월담 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 착수	: 2016.  9.

◦ 우선추진사업 승인(축대 및 산사태위험지구 개선)	: 2017.  5.

◦ 월담지구 진입로 축대 개선공사 실시설계 준공	: 2017.  8.

◦ 월담지구 산사태취약지역 개선공사 실시설계 준공	: 2017.  9.

◦ 월담지구 사면보강 및 마을안길 정비사업 실시설계 준공	: 2018.  8.

◦ 월담 새뜰마을사업 마스터플랜 수립	: 2018.  8.

◦ 월담지구 산사태위험지역 개선공사 준공	: 2018. 11.

◦ 주택정비사업 완료	: 2019.  6.

◦ 월담지구 단군사당 주변 환경개선공사 실시설계 준공	: 2019.  9.

◦ 월담지구 단군사당 주변 환경개선공사 준공	: 2019. 12.

□ 향후 추진계획

◦ 주민공동이용시설 대상부지 매입	: 2020.  3.

‣동산동 330-9번지 일원(333㎡)

◦ 사면보강사업 및 축대개선사업 준공	: 2020.  5.

‣옹벽(L=126m, H=2.0~5.5m), 데크계단(46m) 등

◦ 주민공동이용시설 실시설계 마무리	: 2020.  9.

◦ 주민공동이용시설 착·준공 추진	: 2020. 9.~12.

◦ 마을안길 및 도시가스 공급 추진	: 2020. 7.~12.

◦ 주민역량강화 및 휴먼케어용역 추진	: 2020. 7.~2021.  2.

□ 기 대 효 과

◦ 취약지역 주민의 안전·위생 등 생활 인프라 확충, 주거환경 개선, 주민 역량강화 등을 지원하여 주민의 삶의 질 향상

□ 관 련 사 진 (사업구상도)

(담당부서 :  도시재생과    담당 : 고남수     담당자 : 이석표  ☎ 859 – 5584)

15		도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	(도시재생과)

❖ 100년 철도역사의 역사성을 바탕으로 지역의 정체된 활성화를 통한 새로운 부가가치 창출 지역경제모델 개발

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 사업규모 : 185,007㎡

◦ 총사업비 : 25,000백만원(국비 15,000 도비 2,500, 시비 7,500)

◦ 사업내용 : 사회·경제 어울림센터 조성, 익산 푸드문화 메카조성, 중·매·서 커뮤니티라운지 조성, ‘삼산’ 기역·명소화 프로젝트, 익산역 프롬나드 조성, 세대공감 커뮤니티센터 조성, 익산 도시재생 거버넌스 구축 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,000	7,250	7,850	3,650	3,520	2,730
국 비	15,000	4,350	4,710	2,190	2,112	1,638
도 비	2,500	725	785	365	352	273
시 비	7,500	2,175	2,355	1,095	1,056	819

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 공모 선정	: 2017. 12.

◦ 도시재생 선도지역 지정	: 2018.  5.

◦ 도시재생 활성화계획(안) 승인	: 2018.  8.

◦ 도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣어울림센터

◦ 어울림센터 실시설계 및 선공사 착공	: 2019.  5.

◦ 도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣세대공감 복합커뮤니티시설

◦ 도시재생 활성화계획(안) 변경 승인	: 2019.  7.

◦ 도시재생 활성화계획(안) 변경 고시	: 2019.  9.

◦ 도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣중·매·서 커뮤니티라운지

◦ 도시재생 대학원1기 운영	: 2019. 4.~6.

◦ 도시재생 대학3기 운영	: 2019. 10~12.

□ 향후 추진계획

◦ 도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2020. 1.~2.

‣음식/식품 교육문화원, 문화주차장

◦ 주요 거점시설(세대공감 복합커뮤니티시설) 리모델링공사 착공	: 2020. 3.

◦ 특화거리 한전 지중화 협약	: 2020. 3.

◦ 특화거리 조성사업(문화이리로) 착공	: 2020. 5.

◦ 도시재생 뉴딜사업 주요 거점 조성	: 2020. 6.~

‣어울림센터, 음식/식품 교육문화원, 중·매·서 커뮤니티라운지, 특화거리, 세대공감 복합커뮤니티시설 등 착·준공 추진

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민 활동 추진	: 2020. 6.~

□ 기 대 효 과

◦ 기성 시가지 내 쇠퇴한 지역의 다양한 유·무형 자산을 활용하여 경제적·사회적·문화적 활력 회복과 활성화 기대

□ 관련사진(사업구상도)

(담당부서 :  도시재생과    담당 : 고남수     담당자 : 신두익  ☎ 859 – 7288)

16		모현동 옥창지구 새뜰마을사업	(도시재생과)

❖ 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

❖ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

◦ 위    치 : 익산시 모현동1가 67-73번지 일원

◦ 사업규모 : 29,925㎡

◦ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940 도비 378, 시비 882)

◦ 사업내용 : 안전확보, 생활·위생인프라 구축, 주택정비 지원, 마을공동체 지원사업, 휴먼케어 및 주민역량강화사업 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,200	1,177	1,007	1,007	1,009
국 비	2,940	824	705	705	706
도 비	378	106	91	91	90
시 비	882	247	211	211	213

□ ‘19년까지 추진실적

◦  19년 신규 새뜰마을사업 공모 선정	: 2019.  3.

◦  총사업비 및 우선사업 확정	: 2019.  5.

◦ 우선추진사업 승인(축대 및 산사태위험지구 개선)	: 2019.  5.

‣총사업비 42억 및 우선사업 사면보강사업 승인

◦ 마스터플랜 용역 발주	: 2019.  7.

◦ 사면보강 및 소방도로개설공사 실시설계 착공	: 2019.  8.

◦ 마스터플랜 수립용역 착공	: 2019. 11.

□ 향후 추진계획

◦ 사면보강 및 소방도로개설공사 실시설계 준공	: 2020.  1.

◦ 사면보강공사 설계심의 완료	: 2020.  4.

◦ 사면보강공사 추진	: 2020.  7.~12.

‣편입토지 협의 보상 추진	: 2020.  7.~ 8.

◦ 마스터플랜 수립용역 준공	: 2020. 10.

◦ 마스터플랜 연차별 계획에 따라 사업 추진	: 2020. ~ 2022.

□ 기 대 효 과

◦ 취약지역 주민의 안전·위생 등 생활 인프라 확충, 주거환경 개선, 주민 역량강화 등을 지원하여 주민의 삶의 질 향상

□ 관 련 사 진 (위치도)

원광정보 예술고

이리고현초

(담당부서 :  도시재생과    담당 : 고남수     담당자 : 이석표  ☎ 859 – 5584)

17		익산시 신청사 건립 사업	(도시전략사업과)

❖ 사업목적

▸시민과 공유하고 열린공간으로서 시민에게 향상된 서비스를 제공할 수 있는 시민 친화적 청사를 건립하고자 함

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 12 ~ 2023. 6.

◦ 위    치 : 전라북도 익산시 인북로 32길 1일원(現, 청사부지)

◦ 사업규모 : 연면적 39,271㎡

◦ 총사업비 : 약 850억원(예비비 제외)

◦ 사업내용 : 본청･의회(법정규모 22,336㎡), 지하주차장(14,215㎡), 기타(2,720㎡)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년	2018년 편성액	2019년이후
계	85,000				85,000
국 비
도 비
시 비	85,000				85,000
기 타

□ ‘19년까지 추진실적

◦ 노후 공공건축물 리뉴얼 선도사업 선정(국토부 공모사업	: 2017. 12. 22.

◦ 시민의견 등 수렴	: 2018.  1.~12.

▸직원설문조사(2회), 시민토론회, 시민소통마당 추진(14개 동지역)

▸시민 설문조사(주민편의시설 및 주차장 규모・방향 등)

◦ 신청사 건립 기본계획수립	: 2018.  1. ~ 2019. 1.

◦ 업무협약 체결(국토교통부 ⇔ LH ⇔ 익산시)	: 2018.  4. 24.

◦ 타당성 조사 완료(행정안전부)	: 2019.  8.

◦ 지방재정투자심사 완료(전라북도)	: 2019. 10.

◦ 공유재산관리계획 승인(시의회)	: 2019. 11.  8.

◦ 신청사 건립 설계공모 심사위원 선정	: 2019. 12.

□ 향후 추진계획

◦ 설계 공모 시행 공고	: 2020.  1. 13.

◦ 설계공모 작품 심사	: 2020.  4. 20.

◦ 건립공사 설계용역 계약 체결	: 2020.  5. 12.

◦ 기본설계 및 실시설계 완료	: 2020. 5.~2021. 2.

※ 설계단계별 전문가 자문, 건설기술자문위원회, 제로에너지 인증, 교통영향평가 등 각종 절차 이행

◦ 신청사 건립 공사 시행	: 2021. 상반기 ~ 2023. 6.

□ 기 대 효 과(사업효과)

◦ 준공 50년이 경과한 노후 청사의 구조적 위험성을 해소하여 안전성을 확보하고, 협소한 사무공간 및 청사 분산배치에 따른 시민 불편을 해소

◦ 행정업무 공간 이외에 다양한 정원을 배치하여 시민들이 자유롭게 소통하고, 휴식 및 문화 활동을 즐길 수 있는 공간을 제공

◦ 신청사를 익산의 역사와 문화가 담긴 열린 공간으로 조성하여 시민이 공유하고 쾌적하게 이용할 수 있는 시민친화적 청사 및 시의 랜드마크화

□ 관 련 사 진

당선작 주요 내용

◼ 작품 제목 : 多多익산

◦ 시민에게 열린 청사를 주제로 백제고도 익산의 랜드마크를 구현

▸“자연을 품고 시민과 소통하는 풍경의 숲터”, “시민 공간 중심으로 열린 커뮤니티의 장  “백제고도의 미륵사지 석탑을 담은 미래 역사의 관문”의 테마를 형상화하고 공간화 함

◦ 청사 전면 지상공간에 솔숲공원, 시민정원, 사계정원 등 각종 주제별 공원을 계획하고 지하에 다목적홀, 시민회의실, 도서관 등 시민편의시설을 계획하여 입체적인 시민쉼터로 조성

(담당부서 : 도시전략사업과  담당 : 신청사기획계장 조용섭  담당자 : 김완수 ☎ 859-5678)