2021년(2020회계연도) 재정공시 대상사업 목록

(기준년도 : 2020년도)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요		사업부서	비 고
1	신청사 건립추진	-사업기간 :	2017. 12.~2024. 7.	도시전략사업과
		-총사업비 :	94,800백만원
		-사업규모 :	연면적 40,233.92㎡
		-사업내용 :	본청･의회 22,039.01㎡, 지하주차장 13,745.54㎡, 기타4,449.37㎡
2	미륵사지관광지 조성사업	-사업기간 :	2006.~2021.	문화관광산업과
		-총사업비 :	34,998백만원
		-사업규모 :	관광지 조성 108,743㎡
		-사업내용 :	광장,주차장,편의시설 조성 등
3	관광지 개발 (왕궁 보석테마 대표 관광지 육성사업)	-사업기간 :	2015.~2024.	문화관광산업과
		-총사업비 :	17,150백만원
		-사업규모 :	60,460㎡
		-사업내용 :	관광기반 및 관광진흥조성
4	마동 테니스공원 조성사업	-사업기간 :	2017.~2021.	체육진흥과
		-총사업비 :	13,672백만원 (국비 2,820 시비 10,852)
		-사업규모 :	36,065㎡
		-사업내용 :	테니스코트12면(실외8면, 실내4면(막구조)), 관리동, 주차장 등
5	반다비(장애인)체육센터 건립	-사업기간 :	2019. ~ 2022.	체육진흥과
		-총사업비 :	9,970백만원
		-사업규모 :	연면적 3,480㎡(지하1층, 지상2층)
		-사업내용 :	수중운동실, 다목적체육관, 체력단련실, 다목적실 등

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요		사업부서	비 고
6	목천동 원주아파트 ~ 우석장례식장 간 도로확장	-사업기간 :	2009.∼2022.	도시개발과
		-총사업비 :	9,139백만원
		-사업규모 :	L=1,400m, B=20m→35m(대로1류1호)
		-사업내용 :	도시계획도로확장
7	도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	-사업기간 :	2018.~2022.(5개년)	도시재생과
		-총사업비 :	25,000백만원
		-사업규모 :	중앙동 일원 / 185,007㎡
		-사업내용 :	원도심 활성화
8	모현동 옥창지구 새뜰마을 사업	-사업기간 :	2019.~2022.(4개년)	도시재생과
		-총사업비 :	4,200백만원
		-사업규모 :	24,640㎡
		-사업내용 :	생활인프라 확충 및 주거환경 개선 등
9	평화육교 재가설	-사업기간 :	2015.11.~2021.9.	건설과
		-총사업비 :	53,418백만원
		-사업규모 :	평화육교 재가설 L=770m, B=28.5m(6차로)
		-사업내용 :	고속철도 시설개량 및 육교 재가설
10	서부권 로컬푸드 직매장 신축	-사업기간 :	2019.~2021.	농산유통과
		-총사업비 :	3,480백만원(국 600, 도 270 시 2,610)
		-사업규모 :	연면적 약 998㎡ / 3층
		-사업내용 :	로컬푸드직매장, 안전성검사실 등

1		익산시 신청사 건립 사업

❖ 사업 목적

시민과 공유하고 열린공간으로서 시민에게 향상된 서비스를 제공할 수 있는 시민 친화적 청사를 건립하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 12 ~ 2024. 7.

❍ 위    치 : 전라북도 익산시 인북로 32길 1일원(現, 청사부지)

❍ 사업규모 : 연면적 40,233.92㎡

❍ 총사업비 : 약 948억원

❍ 사업내용 : 본청･의회 22,039.01㎡, 지하주차장 13,745.54㎡, 기타 4,449.37㎡

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이 후
총 계	94,800	9,800	18,000	0	0	40,000	27,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	47,300	9,800	18,000	0	0	0	19,500
기 타	47,500	0	0	0	0	40,000	7,500

□‘20년까지 추진실적

❍ 노후공공건축물 리뉴얼선도사업 선정(국토부 공모사업)  : 2017. 12. 22.

❍ 시민 등 의견수렴                               : 2018. 1. ~ 3.

❍ 신청사 건립 기본계획 수립                      : 2018. 3. ~ 2019. 1.

❍ 주차장 및 주민편의시설 등에 대한 시민의견 수렴 : 2018. 7. ~ 8.

❍ 신청사 건립 시민설명회 개최                    : 2018. 12. 5.

❍ 타당성 조사(행정안전부 : 적정)                   : 2019. 8.

❍ 지방재정투자심사(전라북도 : 조건부 승인)         : 2019. 11.

❍ 공유재산관리계획(익산시의회 : 승인)              : 2019. 11.

❍ 설계공모                                       : 2019. 12. ~ 2020. 4.

❍ 기본 및 실시설계 착수                          : 2020. 5.

❍ 기본설계(안) 보고회 개최 및 의견수렴            : 2020. 8. 31. ~ 9. 7.

❍ 기본설계(안) 자문위원회 개최(서면)              : 2020. 9. ~ 10.

▸건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 각 분야 기본설계(안) 자문

❍ 익산시 임시청사 리모델링 실시설계용역 추진    : ‘20. 10. 19 ~‘21. 1. 6.

❍ 기본설계(안) 설계 경제성 검토 이행회의         : 2020. 12. 1.

❍ 전라북도 교통영향평가심의위원회 심의           : 2020. 12. 18.

❍ 시공단계 건설사업관리용역 발주                : 2020. 12.29.

❍ 신청사 건립계획 시민 의견수렴 실시            : ‘20. 12. 30 ~‘21. 1. 13

▸방    법 : 중간설계(안) 시 홈페이지 게시 시민 의견수렴

□ 향후 추진계획

❍ 임시청사 리모델링 및 부서이전 추진            : 2021. 3. ~ 6.

❍ 신청사 시공단계 건설사업관리용역 추진         : 2021. 4. ~ 신청사 준공시

❍ 신청사 건축 설계용역 완료                     : 2021. 4.

❍ 후관동 철거공사 추진                          : 2021. 6. ~ 9.

❍ 익산시 신청사 건립공사 착공                   : 2021. 8.

❍ 익산시 신청사 건립공사 준공                   : 2024. 7.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 준공 50년이 경과한 노후 청사의 구조적 위험성을 해소하여 안전성을 확보하고, 협소한 사무공간 및 청사 분산배치에 따른 시민 불편을 해소

❍ 행정업무 공간 이외에 다양한 정원을 배치하여 시민들이 자유롭게 소통하고, 휴식 및 문화 활동을 즐길 수 있는 공간을 제공

❍ 신청사를 익산의 역사와 문화가 담긴 열린 공간으로 조성하여 시민이 공유하고 쾌적하게 이용할 수 있는 시민친화적 청사 및 시의 랜드마크화

□ 관련사진

(담당부서 : 도시전략사업과 / 담당 : 신청사기획계 / 담당자 : 조휘재 ☎ 859-5677)

2		미륵사지 관광지 조성사업

❖ 익산의 백제문화자원을 활용한 관광지 개발사업 추진 및 관광시설 확충으로 관광활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2006. ~ 2021.

❍ 위    치 : 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

❍ 사업규모 : 108,743㎡

❍ 총사업비 : 34,998백만원(국비5,127 시비27,871, 민자 2,000)

❍ 사업내용 : 지방도 이설(722호선 및 시도 23호선)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2021년이후
총 계	34,998	23,900	6,654	2,000	2,000
국 비	5,127	2,800	2,327	0	0
도 비	0	0	0	0	0
시 비	27,871	21,100	4,327	2,000	0
기 타	2,000	0	0	0	2,000

□‘20년까지 추진실적

❍ 국토이용계획변경 및 개발계획 결정 고시	: 2004. 01

❍ 관광지 지정 및 고시(149,880㎡)	: 2006. 02

❍ 문화재현상변경 조건부 허가(문화재청)	: 2007. 01

❍ 관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인(108,743㎡)	: 2007. 11

❍ 서부내륙권 광역관광개발 계획(문체부) 포함	: 2015. 05

❍ 문화재현상변경 조건부허가(문화재청)	: 2017. 02

❍ 편입토지 및 지장물 매입(100%)	: 2007. 08 ~ 현재

❍ 미륵사지 관광지 조성계획 변경 승인(전북도)	: 2018. 06.

❍ 미륵사지 관광지 투융자 조건승인(행안부)	: 2018. 07.

❍ 미륵사지 관광지 조성사업 1차분 착공	: 2018. 12.

❍ 미륵사지 관광지 문화재 발굴용역 완료	: 2019. 12.

❍미륵사지 관광지 조성사업 2차분 착공           : 2020. 02.

❍미륵사지 관강지 토지수용 재결 완료            : 2020. 10.

□ 향후 추진계획

❍ 미륵사지 관광지 조성사업 전체분 준공          : 2021. 12.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 익산의 백제문화자원을 활용한 관광지 개발사업 추진 및 관광기반시설 확충으로 백제역화문화 중심지로서의 확고한 이미지 확보와 동시에 관광활성화 도모

□ 관련사진 첨부

(담당부서 : 문화관광산업과 / 담당 : 관광개발계 / 담당자 : 정웅  ☎ 859–5871)

3		왕궁보석테마 대표관광지 육성사업

❖ 전라북도 대표관광지 활성화계획의 일환으로 왕궁보석테마 관광지의 인지도를 향상하기 위한 기반조성 및 관광홍보, 마케팅부분 강화 등 관광환경 개선을 통한 경쟁력 있고 특화된 대표 관광지 육성 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2024

❍ 위    치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

❍ 사업규모 : 160,460㎡

❍ 총사업비 : 17,150백만원(국비 1,000 도비 9,550 시비 6,600)

❍ 사업내용 : (기반시설) 기본계획 수립, 보석광장, 칠선녀 광장, 보석숲 습지 생태공원, 공룡테마공원, 이벤트광장 체험시설 조성(진흥사업) 블링블링 주얼리 페스티벌, 주얼리 차이나데이, 주얼리팸투어, 행사 및 축제 지원 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2021년이후
총 계	17,150	7,150	2,000	2,000	6,000
국 비	1,000	1,000	0	0	0
도 비	9,550	4,550	1,000	1,000	3,000
시 비	6,600	1,600	1,000	1,000	3,000
기 타	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 대표관광지 육성사업 기본계획승인(전라북도)	: 2015. 8. 27.

❍ 지방재정 투융자심사(전라북도)	: 2015. 10. 26.

❍ 보석광장 정비공사(15년사업) 완료	: 2016. 08.

❍ 칠선녀광장 정비공사(16년사업) 완료	: 2017. 03.

❍ 보석숲 및 공룡테마공원 정비공사(17년사업) 완료	: 2018. 05.

❍ 생태습지공원(주차장,연결교량)(18년사업)용역완료	: 2018. 10.

❍ 공룡테마공원 정비사업(19년사업) 실시설계용역 착수	: 2019. 03.

❍ 보석어드벤처사업(20년사업) 실시설계용역 착수	: 2019. 07.

❍ 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획 승인	: 2019. 08.

❍ 생태습지공원(주차장, 연결교량) 정비사업(18년사업)완료	: 2019. 12.

❍ 공룡테마놀이터 설치사업(19년사업)완료              : 2020. 10.

❍ 보석어드벤처사업(20년사업) 착수                    : 2020. 11.

□ 향후 추진계획

❍ 보석어드벤처사업(20년사업) 완료	: 2021. 07.

❍ 제2차 대표관광지 조성사업 기본계획변경	: 2021. 08.

❍ 하늘자전거 설치사업(21년사업) 착수	: 2021. 09.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 대표관광지 육성사업을 통해 시설 노후화로 침체된 왕궁보석테마 관광지에 차별화된 관광시설 도입을 통해 익산시의 관광활성화 도모

□ 관련사진

(담당부서 : 문화관광산업과 / 관광개발계장 / 담당자 : 정웅 ☎ 859–5276)

4		마동 테니스공원 조성사업

❖ 생활체육 활성화와 전국 규모(동호회 등)의 테니스대회 개최를 통한 지역 주민 건강 증진 도모 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.

❍ 위    치 : 익산시 마동 64-8번지 일원

❍ 사업규모 : 36,065㎡

❍ 총사업비 : 13,672백만원(국비 2,820백만원  시비 10,852백만원)

❍ 사업내용 : 테니스 코트 12면(실외8면, 실내4면(막구조)), 관리동, 주차장 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년이후
총 계	13,672 (5,836)	3,000	3,600	5,067	2,005
국 비	2,820	0	1,300	1,520	0
도 비	0	0	0	0	0
시 비	10,852	3,000	2,300	3,547	2,005
기 타	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 실시설계용역 착수	: 2019. 08.

❍ 매장문화재 시굴조사 완료	: 2019. 10.

❍ 의회 공유재산 관리계획 의결	: 2019. 11.

❍ 도 지방재정투자심사 의결	: 2019. 11.

❍ 공원조성계획 변경	: 2020. 02.

❍ 토지 및 지장물 보상 완료	: 2020. 03.

❍ 문화재 발굴조사 완료	: 2020. 05.

❍ 설계심의, 실시계획인가, 도 원가심사 완료	: 2020. 09. ~ 11.

❍ 실시설계 완료	: 2020. 12.

❍ 공사착공	: 2020. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 마동 테니스공원 관리동 신축 완료	: 2012. 10.

❍ 마동 테니스공원 실내테니스장 신축 완료	: 2012. 11.

❍ 공사 준공(예정)	: 2021. 12.

□ 기대효과(사업효과)

❍  생활체육 활성화로 지역 주민 건강 증진도모

❍  전국 테니스대회 개최 등을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 : 체육진흥과 / 담당 : 시설조성계 / 담당자 : 백승훈 ☎ 859–5375)

5		반다비(장애인)체육센터 건립

❖ 장애인의 생활체육 환경 및 프로그램 지원으로 체육활동 참여, 홍보, 상담 등 어울림 체육활동 지원

❖ 시민들의 신체적 건강, 여가활동 증진 및 펜싱 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

❍ 위    치 : 익산시 부송동 산74-2번지 일원(익산종합운동장 내)

❍ 사업규모 : 부지면적 260,000㎡, 연면적 3,480㎡(지하1층, 지상2층)

❍ 총사업비 : 9,970백만원(기금 4,000, 도비 741, 시비 5,229)

❍ 사업내용

▸ 지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸ 지상1층 : 수중운동실, 체육관, 소체육관, 카페라운지 등

▸ 지상2층 : 헬스장, 사무실, 체력측정실, 다목적실 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계 (집행액)	9,970	0	2,200	2,200	5,570
국 비	4,000	0	1,000	1,000	2,000
도 비	741	0	0	0	741
시 비	5,229	0	1,200	1,200	2,829
기 타	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 의결	: 2019. 07.

❍ 공공건축사업계획 사전검토	: 2019. 09.

❍ 설계공모(용역) 전라북도 원가심사	: 2019. 10.

❍ 설계공모 및 작품선정	: 2019. 11. ~ 2020. 03.

❍ 설계용역 및 운동장조성계획 변경	: 2020. 04. ~ 09.

❍ 계약심의위원회 심의	: 2020. 10.

❍ 공사 및 감리업체 선정	: 2020. 10. ~ 11.

❍ 공사 착공	: 2020. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공(15개월)	: 2022. 04.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 장애인 체육활성화 및 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화

□ 조 감 도

(담당부서 : 체육진흥과 / 담당 : 시설조성계 / 담당자 : 정용복 ☎ 859-5872)

6		목천동원주아파트~우석장례식장간 도로확장

❍ 도시가로망 구축으로 주거환경 개선 및 주민생활 편익도모

❍ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2009. ∼ 2022.

❍ 위    치 : 익산시 평화육교 ~ 목천삼거리

❍ 사업규모 : L=1,400m, B=20m→35m(대로1류1호)

▸1단계 : 우측 L= 200m, 좌측 L=970m(기시공)

▸2단계 : 우측 L=1,200m, 좌측 L=430m

- 1차분 : 좌∙우측 각 L=430m(평화육교 ~ 목상교)

❍ 총사업비 : 9,139백만원(공사비 4,443 / 보상비 4,696)

❍ 사업내용 : 도시계획도로확장

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계 (집행액)	9,139	4,139	50	100	4,850
국 비	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0
시 비	8,417	3,417	50	100	4,850
기 타	722	722	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 1단계 공사 착공 및 준공(L=1,170m)	: 2014. 12. ~ 2017. 10.

❍ 잔여분 실시설계용역	: 2019. 01. ~ 2020. 12.

❍ 투자심사	: 2020. 11. 13.

❍ 2단계 1구간 토지보상(100%)	: 2021. 02.

❍ 2단계 1구간 공사착공(L=870m)	: 2021. 02. 19.

□ 향후 추진계획

❍ 2단계 1구간 조기 개통	: 2021. 06.

❍ 2단계 1차분 공사 준공	: 2021. 10.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 도시계획도로 확장으로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 관련사진 첨부 (조감도, 완료전경, 진행사진, 위치도, 관련도표 등)

(담당부서 :  도시개발과    담당 : 김대영     담당자 : 김대영  ☎  859-5513 )

7		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)

❖ 100년 철도역사의 역사성을 바탕으로 지역의 정체된 활성화를 통한 새로운 부가가치 창출 지역경제모델 개발

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

❍ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

❍ 사업규모 : 185,007㎡

❍ 총사업비 : 25,000백만원(국비 15,000 도비 2,500, 시비 7,500)

❍ 사업내용 : 사회·경제 어울림센터 조성, 익산 푸드문화 메카조성, 중·매·서

커뮤니티라운지 조성, ‘삼산’ 기역·명소화 프로젝트, 익산역

프롬나드 조성, 세대공감 커뮤니티센터 조성, 익산 도시재생

거버넌스 구축 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계 (집행액)	25,000	7,250	7,850	3,650	6,250
국 비	15,000	4,350	4,710	2,190	3,750
도 비	2,500	725	785	365	625
시 비	7,500	2,175	2,355	1,095	1,875
기 타	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍  도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 공모 선정	: 2017. 12.

❍  도시재생 선도지역 지정	: 2018. 5.

❍  도시재생 활성화계획(안) 승인	: 2018. 8.

❍  도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣어울림센터

❍  어울림센터 실시설계 및 선공사 착공	: 2019. 5.

❍  도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣세대공감 복합커뮤니티시설

❍  도시재생 활성화계획(안) 변경 승인	: 2019. 7.

❍  도시재생 활성화계획(안) 변경 고시	: 2019. 9.

❍  도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2018. 12.

‣중·매·서 커뮤니티라운지

❍  도시재생 대학원1기 운영	: 2019. 4.~6.

❍  도시재생 대학3기 운영	: 2019. 10.~12.

❍  도시재생 거점시설 부지매입 및 보상	: 2020. 1.~2.

‣음식/식품 교육문화원, 문화주차장

❍  주요 거점시설(세대공감 복합커뮤니티시설) 리모델링공사 착공	: 2020. 3.

❍  특화거리 한전 지중화 협약	: 2020. 3.

❍  특화거리 조성사업(문화이리로) 착공                  : 2020. 5.

❍  원도심 빈공간 창업 컨설팅 추진                             : 2020.  6. ~ 11.

❍  중앙어게인 행사 운영                                       : 2020.  8.

❍  익산 원도심 빈공간 조사 및 활용방안 수립 용역 착공         : 2020.  9.

❍  중매서 커뮤니티라운지 공공디자인 심의 용역 착공            : 2020.  9.

❍  문화주차장 조성 공사 착공                                  : 2020.  9.

❍  도시재생 활성화계획 변경 용역 착공                         : 2020.  9.

❍  문화주차장 조성공사 지정폐기물 철거 및 처리 착공           : 2020.  9.

❍  복합커뮤니티센터 리모델링 완료                             : 2020. 12.

❍  문화주차장 조성공사 완료                                   : 2020. 12.

❍  역사가문화로 2020년 도시재생 주민공모사업 운영             : `20.9.~`21.3.

❍  빈공간 창업희망자를 위한 유동인구 조사 및 상권분석         : `20.11.~`21.4.

❍  중앙어게인 시즌2(정기버스킹)운영                            : `20.11.~`21.9.

❍  도시재생 뉴딜사업(역사가문화로)활동 기록화                  : `20.12.~`21.6.

❍  문화주차장(2공구) 대상지 토지 매입 완료                     : `20.12.~`21.1

□ 향후 추진계획

❍  도시재생 뉴딜사업 주요 거점 조성	: 2021. 1. ~

‣어울림센터, 음식/식품 교육문화원, 중·매·서 커뮤니티라운지, 특화거리 등 설계 및 공사 착·준공 추진

❍  도시재생 활성화를 위한 주민 활동 추진              : 2021. 1. ~

□ 기대효과

❍ 기성 시가지 내 쇠퇴한 지역의 다양한 유·무형 자산을 활용하여 경제적·사회적·문화적 활력 회복과 활성화 기대

□ 관련사진

(담당부서 : 도시재생과 / 담당 : 재생시설계 / 담당자 : 고 경 희  ☎ 859 - 4563)

8		모현동 옥창지구 새뜰마을 사업

❖ 취약지역의 지속가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

❖ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

❍ 위    치 : 익산시 모현동1가 67-73번지 일원

❍ 사업규모 : 24,640㎡

❍ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940 도비 378 시비 882)

❍ 사업내용 : 안전확보, 생활‧위생인프라 구축, 주택정비 지원, 마을공동체 지원사업, 휴먼케어 및 주민역량강화사업 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,200	1,177	1,007	1,176	840
국 비	2,940	824	705	823	588
도 비	378	106	91	106	75
시 비	882	247	211	247	177

□‘20년까지 추진실적

❍ 19년 신규 새뜰마을사업 공모 선정	: 2019.  3.

❍ 총사업비 및 우선사업 확정	: 2019.  5.

❍ 마스터플랜 수립용역 발주	: 2019.  7.

❍ 소방도로 및 사면보강 실시설계 착공	: 2019.  8.

❍ 마스터플랜 수립용역 착공	: 2019. 11.

❍ 소방도로 및 사면보강 실시설계 준공	: 2020.  1.

❍ 소방도로 및 사면보강 설계심사 완료	: 2020.  6.

❍ 마스터플랜 수립용역 준공기한 연장	: 2020.  6.

- 전염병(코로나 바이러스) 등 불가항력 사유에 따른 계약기간 연장

❍ 마스터플랜 수립용역 일시정지	: 2020.  9.

- 관내 코로나 바이러스 급증으로 인한 전염 및 피해방지

❍ 소방도로 및 사면보강 편입토지 감정평가 완료	: 2020. 10.

❍ 소방도로 및 사면보강 편입토지 보상 협의 추진	: 2020. 11.~12.

❍ 소방도로 및 사면보강 착공	: 2020. 12.

❍ 마스터플랜 수립용역 준공	: 2020. 12.

❍ 소방도로 및 사면보강 공사중지	: 2020. 12.

- 동절기로 인한 부실공사 방지

□ 향후 추진계획

❍ 소방도로 및 사면보강 편입토지 보상 추진	: 2021.  1.~ 3.

❍ 소방도로 및 사면보강 재착공	: 2021.  3.

❍ 도시가스 공급사업 위‧수탁 협약 체결(전북에너지서비스)	: 2021.  3.

❍ 주요 사업부지 매입 및 실시설계 완료	: 2021.  5.

❍ 쉼터조성, 골목길환경정비, 예방시설설치 계약심사 완료 : 2021.  6.

❍ 쉼터조성, 골목길환경정비, 예방시설설치공사 추진	: 2021.  7.~12.

❍ 소방도로 개설공사 준공	: 2021.  8.

❍ 사면보강 정비사업 준공	: 2021. 10.

❍ 마스터플랜 연차별 계획에 따라 사업 추진	: 2021. ~ 2022.

- 도시가스, 주택정비지원, 주민공동이용시설, 주민역량강화 및 휴먼케어용역 등

□ 기 대 효 과

❍ 취약지역 주민의 안전‧위생 등 생활 인프라 확충, 주거환경 개선, 주민역량강화 등을 지원하여 주민의 삶의 질 향상

□ 관 련 사 진

원광정보 예술고

이리고현초

(담당부서 : 도시재생과 / 담당 : 주거재생계 / 담당자 : 김상현  ☎ 859–7424)

9		호남고속철도 시설개량 및 평화육교 재가설

❖ 사업 목적

노후화된 육교와 고속철도 시설개량으로 시민들의 통행 안전과 도심 내 교통여견을 개선하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2021. 9.

❍ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

❍ 사업규모 : 연면적 40,233.92㎡

▸KTX호남고속철도 시설개량 L=864m (2선로 → 4선로 확장)

▸평화육교 재가설 L=365.5m (4차로 → 6차로)

▸접속도로 철거 및 신설 L=770m

▸대체우회도로 (4차로) L=1,068m

❍ 총사업비 : 53,051백만원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이 후
총 계	53,418	34,118	10,457	2,925	305	5,613	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	30,700	30,700	0	0	0	0	0
시 비	22,351	3,418	10,457	2,925	305	5,613	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 기재부 총사업비 승인	: 2015.  4.  6.

❍ 기본 및 실시설계 용역	: 2015. 11.~2017. 1.

❍ 공사 착공	: 2017.  7. 18.

❍ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2017.  9. ~ 현재

❍ 평화육교 재가설공사 추진	: 2017.  7. ~ 현재

▸대체우회도로 설치(4차로)	: 2018.  4. ~ 7.

▸평화육교 철거(전면통제 2018.7.~2019.12.)	: 2018.  7. ~ 9.

▸공사 추진(공정율 71%)	: 2018. 10. ~ 현재

□ 향후 추진계획

❍ 평화육교 접속램프 및 교량 재가설	: 2021.1.~2021.5.

❍ 평화육교 개통	: 2021. 6.

❍ 대체우회도로 철거 및 원상복구	: 2021. 7. ~ 8.

❍ 공사완료	: 2021. 9.

□ 기대효과(사업효과)

❍ 안전등급 D등급인 평화육교를 재가설하여 KTX호남고속철도 통과 시 진동으로 인한 안정성확보 및 위험요소 해소로 시민들의 안전성 확보

□ 관련사진

제일아파트

시외버스터미널

(담당부서 : 건설과  담당계장 : 임대성  담당자 : 남승복 ☎ 859-5536 )

10		서부권 로컬푸드 직매장 신축

❖ 익산시 서부권 도시민에게 우리지역에서 생산되는 건강하고 신선한 먹거리를 제공하고 지역 소농들의 농가소득 증대를 통한 농촌복지 실현 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 9.~ 2021. 9.

❍ 위    치 : 익산시 모현동 2가 671

❍ 사업규모 : 연면적 약 998㎡ / 3층

❍ 총사업비 : 3,480백만원(국 600, 도비 270, 시비 2,610)

❍ 사업내용 : 로컬푸드직매장, 안전성검사실, 소포장실, 사무실 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 편성액	2021년이후
계 (집행액)	3,480	0	3,000	480	0
국 비	600	0	600	0	0
도 비	270	0	270	0	0
시 비	2,610	0	2,130	480	0
기 타	0	0	0	0	0

□‘20년까지 추진실적

❍ 농림축산식품부 「직매장 지원사업」공모사업 선정	: 2019. 2.

❍ 설계용역 완료 및 공사 발주	: 2020. 9.

❍ 서부권 로컬푸드 직매장 신축 공사계약 및 착공	: 2020. 11.

□ 향후 추진계획

❍ 서부권 로컬푸드 직매장 준공	: 2021. 7.

❍ 서부권 로컬푸드 직매장 개장	: 2021. 9.

□ 기대효과(사업효과)

❍  소비자들이 지역 소농과 소통하고 즐길수 있는 체험공간 및 복합공간 조성

❍ 지역 소농 소득 증대로 농촌 복지 실현 및 소비처 확보를 통한 일자리       창출 및 인구 유입 효과

□ 관련사진 첨부 (조감도)

(담당부서 :  농산유통과    담당 :  로컬푸드계   담당자 :  김현경  ☎859-3793)